투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	「홍릉 바이오·의료 R&D 설계용역」계약변경(용역기간 연장) 의뢰

우리본부에서 시행중인 『홍릉 바이오·의료 R&D 앵커 조성사업 설계용역』관련하여 아래같이 계약변경(용역기간 연장)을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다

가. 용 역 명 : 홍릉 바이오·의료 R&D 앵커 조성사업 설계용역

나. 계약상대자 : ㈜제이유건축사사무소 대표 박제유

다. 계약변경 요청 내용 : 용역기간 연장(40일)

구 분	당 초	변 경	증․감	비고
계약금액	959,212,000원	959,212,000원	변경없음
용역기간	‘16.07.08 ~ ’17.05.31	‘16.07.08 ~ ’17.07.10	40일 연장

라. 연장사유 : 기본설계 기술심의 및 도시계획시설결정변경에 따른 인허가

절차 등 설계용역 기간 연장

붙임 : 1. 설계용역 기간 연장 검토보고 1부.

2. 합의 각서 1부.

3. 홍릉 바이오·의료 R&D 앵커 조성사업 설계용역 설계용역기간 요청 공문 1부. 끝

	건축부장
주무관	김찬유		건축총괄과장	박범규		건축부장	05/25 김진용
협조자
시행	건축부-9026	(		)	접수		(		)
	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)