시공원 보수정비사업 설계심의 결과

심의개요

□ 일    시 : 2017. 5. 26(금) 14:00 ~ 15:40

□ 장    소 : 푸른도시국 회의실(9층)

□ 심의위원 : 공원관리팀장, 공원협력팀장, 녹지관리팀장, 서울식물원조성팀장

□ 심의안건

- 답십리근린공원 보수정비 외 1개 사업(동대문구, 200백만원)

- 노량진근린공원 보수정비(동작구, 100백만원)

- 상도근린공원 보수정비(동작구, 100백만원)

심의결과

구 별	사 업 명	사 업 개 요	결 과	심 의 내 용
동대문구	답십리근린공원 보수정비 외 1개 사업	∘위 치 : 답십리동 산2-9 일대 ∘사업비 : 200,000천원 ∘사업내용 - 식재공사 : 산벚나무 등 12종 - 시설물공사 : 목재계단 등 15종 - 철거공사 : 평의자 등 14종	조건부	○ 사유지 사업 시행으로 인한 민원 및 부당이득금 청구 소송 사전 예방 - 사유지는 토지주 사용 승낙 동의 절차이행 후 사업 시행 ○ 공원조성계획 변경에 해당되는 시설물 보수·정비(설치)시 도시공원위원회 심의(자문) 등 사전절차를 이행하기 바람 ○ 답십리근린공원 대상지(1) - 남·북측 등산로 정비 구간은 토사유실 방지를 위한 우·배수계획을 검토하기 바람 - 마사토포장 후 야자매트 설치 구간 성토부분은 토사반입 보다 주변 흙을 활용 하는 방안을 검토하기 바람 ○ 답십리근린공원 대상지(2) - 등의자, 평의자는 기존 H형강, 편강 등의 상태가 양호해 보임으로 직영으로 보수하는 방안을 재검토하기 바람 - 목재계단 정비 구간은 토사유실 방지를 위한 우·배수계획을 검토하기 바람 ○ 답십리근린공원 대상지(3) - 정상부 전체에 대한 우·배수계획 및 체육시설 주변 빈공간 활용계획에 대하여 검토하기 바람

구 별	사 업 명	사 업 개 요	결 과	심 의 내 용
동대문구	답십리근린공원 보수정비 외 1개 사업	∘위 치 : 답십리동 산2-9 일대 ∘사업비 : 200,000천원 ∘사업내용 - 식재공사 : 산벚나무 등 12종 - 시설물공사 : 목재계단 등 15종 - 철거공사 : 평의자 등 14종	조건부	○ 답십리근린공원 대상지(3) - 정상부 체육시설 주변에 그늘목을 식재하여 이용하는 시민들에게 편의를 제공하는 방안을 검토하기 바람 - 산림복원 구간 식재면적에 비해 관목 수량이 과다하고 산지형공원 식재방법으로 열식은 부적정함으로 수량 및 식재방법에 대해 재검토하기 바람 - 산림복원 구간 성토량이 부족해 보임으로 재산출하고 토사 방출은 최소화할 수 있는 방안을 검토하기 바람 - 산림복원 구간 난간은 상부에 캡이 없는 심플한 디자인으로 설치 목적·높이·위치 등이 적합한지 재검토하기 바람 - 산림내 다듬어진 견치석 보다 자연스러운 깬돌을 도입하는 방안을 재검토하기 바람 ○ 배봉산근린공원 대상지(4) - 배수로 바닥은 정형적인 사고석보다는 자연스러운 재질로 재검토하기 바람 - 파고라 보수 시 인위적인 폴리카보네이트 보다 자연 친화적 재료로 재검토하기 바람 - 야외운동기구 철거 및 신설에 대해서는 이용 시민들의 의견을 충분히 수렴하여 제품을 선정하고(답십리공원 포함) 색상은 기와진회색으로 도면에 명기하기 바람
동작구	노량진근린공원 보수정비	∘위 치 : 본동 126-449 일대 ∘사업비 : 100,000천원 ∘사업내용 - 식재공사 : 이팝나무 등 5종 - 시설물공사 : 핸드레일 등 9종 - 철거공사 : 목재난간 등 7종	조건부	○ 사유지 사업 시행으로 인한 민원 및 부당이득금 청구 소송 사전 예방 - 사유지는 토지주 사용 승낙 동의 절차이행 후 사업 시행 ○ 공원조성계획 변경에 해당되는 시설물 보수·정비(설치)시 도시공원위원회 심의 등 사전절차를 이행하기 바람 ○ 오금펴기는 시민들의 이동 동선에 지장이예상되는 바 설치위치는 재검토하기 바람 ○ 핸드레일은 목적에 맞게 경사가 급한 구간에 높이는 산림청 기준에 적합하도록 설치하기 바람 ○ 경사면 나대지 식재면적에 비해 교목·관목 수량이 과다함으로 적정량으로 조정하고 산지형공원에 적합하지 않는 스트로브잣나무는 재검토하기 바람 ○ 파고라 보수 시 인위적인 폴리카보네이트 보다 자연 친화적 재료로 재검토하기 바람

구 별	사 업 명	사 업 개 요	결 과	심 의 내 용
동작구	상도근린공원 보수정비	∘위 치 : 상도동 533-3 일대 ∘사업비 : 100,000천원 ∘사업내용 - 식재공사 : 산벚나무 등 7종 - 시설물공사 : 핸드레일 등 5종 - 철거공사 : 오금펴기 등 4종	조건부	○ 사유지 사업 시행으로 인한 민원 및 부당이득금 청구 소송 사전 예방 - 사유지는 토지주 사용 승낙 동의 절차이행 후 사업 시행 ○ 공원조성계획 변경에 해당되는 시설물 보수·정비(설치)시 도시공원위원회 심의 등 사전절차를 이행하기 바람 ○ 마사토포장 구간에 맹암거 등 우배수시설을 보완하는 방안을 검토하기 바람 ○ 핸드레일은 목적에 맞게 경사가 급한 구간에 높이는 산림청 기준에 적합하도록 설치하기 바람 ○ 산지형공원임을 감안 잣나무, 청단풍식재는 재검토하기 바람