투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사 전면책임감리원, 현장소장 귀하
(경유)
제목	토지사용승낙서 송부 및 공정표제출과 조속 공사추진지시

1. 도시철도토목부-6544호(2017.05.24.) 및 둔재2017-89호 (2017.05.31.)와 관련입니다.

2.『서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사』 937정거장 #1출입구 및 환기구 설치공사를 위한 둔촌주공아파트 재건축조합 부지내 공공공지(둔촌동 174-1)에 대한 토지사용승낙서를 송부하오니 조속한 시일내에 2018.10월 개통에 맞춰 완공토록 공정표를 작성하여 ‘17.6.7까지 감리단 검토후 본부에 제출하고 공정에 맞춰 시설물 완공 지연시 시공사에 많은 어려움이 있을 것으로 예상되니  역공정표를 작성하여 공사시행에 만전을 기하기 바라며, 작업진행사항은 일일작업보고하시기 바라며, 본 토공작업전 우선 공사안내판 설치, 담장철거·수목제거, 작업장 정리 등 조속히 착수하여 향후 이용시민 및 주민피해가 최소화 될 수 있도록 특단에 조치하시기 바랍니다.

붙임 : 관련공문 및 토지사용승낙서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	서재원		주무관	문병종		토목2과장	방영복		도시철도토목부장	06/01 김진팔
협조자
시행	도시철도토목부-6963	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96) 프리미어플레이스 9층	/
전화	02-772-7125	/전송	02-772-7306	/	seojw83@seoul.go.kr	/	부분공개(5)