문서번호	기전과-4129
결재일자	2017.6.9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
황준석		박심근	06/09 이종엽
협조	주무관		代황준석
	주무관		임창규

겸재교 엘리베이터 유지관리 용역 추가 계약 보고

2017. 6.

성동도로사업소

(기 전 과)

겸재교 엘리베이터 유지관리 용역 추가 계약 보고

겸재교 엘리베이터가 인수함에 따라 비상상황시 신속한 대처가 가능토록 엘리베이터 유지관리 용역 업체와 계약코자 보고 드림

□ 근  거

□ 겸재교 승강기(엘리베이터) 인수 계획(기전과-4097호, 2017. 6. 8)

□ 시설현황

연 번	시설물명	종 류	단위	수 량	비 고
1	응봉교	승강기 (엘리베이터)	대	1	기존 용역계약
2	겸재교		대	2	추가 용역계약

□ 기존 용역계약 현황

□ 계 약 명 : 응봉교 엘리베이터 유지관리 용역

□ 계약기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017.12.31.

□ 계약금액 : 6,270,000원

□ 계 약 자 : 누리엔지엔지니어링㈜ *******

□ 추가 계약금액 변경                                                         (단위 : 원)

구 분	변경 전	변경 후	증·감	비 고
계약금액	6,270,000	13,420,000	증 7,150,000	6개월15일

※ 겸재교 엘리베이터 2대(6.16 ~ 12.31) 추가로 금액 증액

□ 계약변경 사유

□ 2017년 6월 9일 겸재교 엘리베이터 인수인계에 따른 시설물 확충으로 유지관리 대상 추가분 증가로 계약변경

□ 예산과목

□ 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비.

□ 향후계획

□ 상기와 같이 엘리베이터 유지관리 용역 업체와 추가 계약을 시행하여 겸재교 엘리베이터 유지관리에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 1. 엘리베이터 유지관리 용역 견적서 1부.

2. 엘리베이터 유지관리 용역 계약변경 내역서 1부.   끝.