투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	난지물재생센터 환경개선 설비공사(총차1회, 1차1회) 계약변경 의뢰

우리 본부에서 시행 중인 「난지물재생센터 환경개선 설비공사」에 대하여 다음과 같이 계약변경 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 난지물재생센터 환경개선 설비공사(장기계속)

나. 계 약 자 : 미강기업 외 1개사

다. 변경내역                                          (단위:원)

구 분		당 초	변 경	비고
계약기간	총차	`16.09.02 ~ `20.01.18	변경없음
	1차	`16.09.02 ~ `17.06.30	변경없음
계약금액	총차	2,757,309,000	2,774,000,000	증)16,691,000
	1차	943,000,000	943,000,000	내역변경

라. 예산과목 : 물순환국 물재생시설과, 물재생시설개선 및 관리, 물재생시설 개선, 난지물재생센터 환경개선, 시설비

붙임  1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(총차1회, 1차1회) 각 1부

3. 합의서 1부.  끝.

	설비부장
★주무관	김도형		환경설비과장	여인웅		설비부장	06/12 권오식
협조자	경리과장	최정수
시행	설비부-9659	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩(15층)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8619	/전송	02)3708-8659	/	dokebi@seoul.go.kr	/	부분공개(5)