문서번호	대기관리과-11780
결재일자	2017.6.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
실무사무관	운행차관리팀장	대기관리과장
권태섭	임미경	06/12 정미선

노후경유차 운행제한 단속시스템

감리용역 추진 계획

2017. 6. 12.

기후환경본부

(대기관리과)

노후경유차 운행제한 단속시스템

감리용역 추진 계획

○ 수도권 대기질 악화의 주범인 노후경유차의 진입 통제를 위하여 추진하고 있는 노후경유차 운행제한 단속시스템 추가 설치 사업에 대하여

○ 외부 전문업체로 하여금 감리용역을 시행하여 공정관리 등 기술지도를 통하여 사업의 품질을 향상시키고 안전사고에 대비하고자 함.

Ⅰ		노후경유차 단속시스템 추진개요

□ 사업 개요

○ 사업명 : 2017노후경유차 운행제한 단속시스템 구매설치

○ 규  모 : 노후경유차 운행제한 단속시스템 설치 22지점

- 인식카메라 30대 및 네트워크 카메라 22대 및 단속시스템 1식

○ 사업기간 : 착공일로부터 150일

○ 사 업 비 : 2,371,224천원

○ 계약방법 : 협상에 의한 계약

□ 그간 추진 경과

○ ‘17. 3.  2  : 운행제한 단속시스템 추가 설치계획 방침 수립

○ ‘17. 4. 10. : 정보화분야 예산타당성 심사

○ ‘17. 4. 27. : 제안요청서 검토

○ ‘17. 5.  8. : 일상감사 결과 통보

○ ‘17. 5. 15. : 계약심사 결과 통보

○ ‘17. 5. 14. : 제안요청서 사전규격 공개(10일간)

○ ‘17. 5. 25. : 계약심의위원회 개최결과 통보

○ ‘17. 5. 29. : 정보화사업 보안성 사전 검토

○ ‘17. 5. 31. ~ 6. 13 : 입찰공고 및 제안요청서 접수

Ⅱ		감리용역 추진계획

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 노후경유차 운행제한 단속시스템 설치 감리용역

○ 용 역 비 : 16,368천원

○ 사업기간 : 착공일로부터 150일

○ 사업범위 : 노후경유차 운행제한 단속시스템 설치 정보통신감리

□ 시행방법

○ 계약방법 : 수의계약

- 계약상대자 : ㈜극동문화전기설계 김경용 외 2인(통신설계및감리)

- 관련근거

· 지방계약법 제9조제1항 및 같은 법 시행령 제25조제1항5호

· 2017 수의계약 제도 개선계획(행정1부시장 제84호, 2017.3.17.)

· 2017 수의계약 제도 개선계획(재무과-14392, ‘17.3.21)

□추정가격 1천5백만원 이하(부가가치세 제외)

□ 세부 추진일정

○ ‘17. 6. 12. : 감리기술용역 타탕성 심사 요청(기술심사담당관)

○ ‘17. 6. 19. ~ 6. 26 : 감리기술용역 발주

○ ‘17. 6. 30. : 감리기술용역 계약 및 착공.

붙임 : 1. 용역비 산출 내역서 1부.

2. 과업지시서 1부.  끝.