문서번호	방재시설부-10125
결재일자	2017.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
박계현		장수철	06/13 남궁용
협 조
	주무관			김소연

「양평1유수지 CSOs저류조 설치공사 건설사업관리용역」

물가변동에 의한 계약금액 조정 검토 보고

2017.06.

도시기반시설본부

방재시설부

「양평1 유수지 CSOs 저류조 설치공사 건설사업관리용역」

물가변동에 의한 계약금액 조정검토

『양평1유수지 CSOs저류조 설치공사 건설사업관리용역』물가변동(제1회) 반영에 대한 검토 보고임.

[관련공문 : 경동 제2017-1052(2017.06.13.)호]

1		용 역개요

❍ 용 역 명 : 양평1유수지 CSOs저류조 설치공사 건설사업관리용역

❍ 용역기간 : 2016.10.10.~2019.06.29.(전체)

2016.10.10.~2017.11.18.(1차)

❍ 용 역 비 : 1,473,670,000원(1차 : 406,929,000원)

❍ 용 역 사 : ㈜경동엔지니어링 등 4개사

2		보고내용

❍ 건설사업관리용역 물가변동(제1회) 반영 검토

- 계약 체결 후 계약금액을 구성하는 각종 품목 또는 비목의 가격이 상승

또는 하락된 경우 그에 따라 계약금액을 조정함으로써 계약당사자의

원활한 계약이행 도모

❍ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조

- 동법 시행령 제73조 및 동법시행규칙 제72조

- 기술용역계약 일반조건 15조

❍ 계약금액 조정대상 여부 검토

- 계약금액 조정요건 : 2가지 조건 동시 충족

· 계약체결일 이후 90일 경과

· 품목 및 지수조정률 3%이상(품목조정 적용)

❍ 물가변동(제1회) 금액 산출

구 분	검토내용	비 고
비교시점	2016.10.07	계약체결일
조정기준일	2017.01.05	계약 체결 후 90일 이상 경과
계약금액	1,322,210,000	손해배상공제료, 부가가치세 제외
물가변동 제외대가	13,130,000	2016.10.07.~2017.01.04
물가변동 적용대가	1,309,080,000	17.01.05. 이후 (당초 계약단가 적용시)
물가변동 반영대가	1,364,380,000	17.01.05. 이후 (물가상승 단가 적용시)
물가변동 조정금액	55,300,000	물가변동반영대가-물가변동 적용대가
물가변동율	4.23%	조정율 3% 이상 충족
선금급 공제금액	-
물가변동 반영금액	55,300,000

5		보고자 의견

❍『양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사 건설사업관리용역』물가변동으로 인한 계약금액조정건에 대하여 관련 규정에 의한 검토 결과, 타당한 것으로 판단되어 계약금액 조정 승인통보하고, 차후 설계변경에 반영코자 함.

붙 임 : 관련 공문 1부.  끝.