투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	조달청장(예산사업관리과장)
(경유)
제목	물가변동 조정기준일 재검토 결과 제출(E20170512)

1. 조달청 예산사업관리과 2017-128호(2017.05.16.)와 관련입니다.

2. 서울지하철 9호선3단계 923공구 건설공사(4회ES)의 물가변동 조정기준일 재검토 결과를 붙임과 같이 제출 합니다.

가. 변경 조정기준일에 대한 검토 결과

구 분	시공사 제출(안)	조달청 요구(안)	비고
계약일	2010. 09. 17	2010. 09. 17
직전조정일(기준시점)	2013. 09. 01	2013. 09. 01
조정기준일(비교시점)	2017. 01. 31	2017. 01. 01
물가변동 경과기간	1,247일	1,217일
노무비 적용	2017. 01. 01	2017. 01. 01
생산자 물가지수 적용	2017. 01. 31	2017. 01. 01
적용 공정율	77.46%	76.29%
물가변동 적용대가	21,048,928,000	22,274,020,000
지수조정율	4.08%	2.84%
조정금액	858,796,000	-
검토결과	충족	미달

붙임 : 검토의견서 1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정삼기		토목3과장	김정수		도시철도토목부장	06/14 김진팔
협조자
시행	도시철도토목부-7485	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)	/
전화	02-772-7238	/전송	02-772-7306	/	junsamgi@seoul.go.kr	/	대시민공개