“창조하는 기술인․생각하는 지식인․화합하는 동명인”

수신자  서울시 도시기반시설본부장

(참조), 도시철도토목부장

제  목  물가변동(4회) 조정기준일 재검토 보고

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 업무연락전-도시기반시설본부-17-4837호(2017.05.17.) 및 대림서지923(공) 제17-152호(2017.05.31)호와 관련입니다.

3. 서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사와 관련 물가변동(4회) 조정기준일 재검토 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

붙    임 : 1. 감리 검토의견서 1부.

2. 시공사 공문 사본 1부.  끝.

(주)동명기술공단종합건축사사무소

서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사 전면책임감리

책임감리원  권 일 순(인)

수신처 :

담당 : 이사 김창섭                        책임감리원 : 권일순

협조 :

시행 : 동명감923 제2017-134호 (2017.06.08)                     접수 :         -          (20     .      .    )

주소 : (05359) 서울시 강동구 천호대로 1244(둔촌동 600) 2층  /  http://www.dmec.co.kr

전화 : 02-473-1923(토목), 02-470-7327(상부분야)  /  전송(FAX) 02-474-1923   /  92309@hanmail.net

감 리 검 토 보 고 서
공사명	서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사
제 목	물가변동(4회) 조정기준일 재검토
1. 검토목적 ∘서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사와 관련하여 “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제73조”에 의거 계약상대자로부터 물가변동 조정기준일 재검토 결과 적정 여부를 검토코자 함. 2. 공사개요 ∘공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사 ∘공사구간 : 강동구 둔촌동 산 29번지 일원 ~ 보훈병원 앞 ∘공사규모 : - 총 연 장 : L=1,782m - 본 선 : L=1,578m (개착: 1,168m, 터널: 410m) - 정 거 장 : L= 204m (1개소, 개착) - 본선환기구 : 4개소 ∘공사기간 : 2010. 09. 20 ~ 2018. 12. 31(8차공사 : 2017.03.15.～2017.12.31) ∘공 사 비 : 101,836백만원(8차공사 : 18,910백만원) ∘시 공 자 : 대림산업(주) 외 5개사 ∘감 리 자 : (주)동명기술공단종합건축사사무소 외 3개사 3. 검토내용 1) 관련근거 ∘업무연락전-도시기반시설본부-17-4837호(2017.05.17.) 2) 물가변동(4회) 추진경위 ∘2017. 04. 17 : 물가변동(4차)으로 인한 계약금액 조정신청 [시공사→본부, 대림서지923(공) 제17-101호] ∘2017. 04. 12 : 물가변동(4회)으로 인한 계약금액 조정신청 검토요청 [본부→감리단, 업무연락전-도시기반시설본부17-3595호] ∘2017. 04. 24 : 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토 보고 [감리단→본부, 동명감923 제2017-99호] ∘2017. 05. 17 : 물가변동 조정기준일 재 검토요청 [본부→감리단, 업무연락전-도시기반시설본부17-4837호]

3) 물가변동 재검토 내용

가) 조정기준일

∘당초 : 2017.01.31

∘변경 : 2017.01.01

나) 검토내용

구 분	시공사 제출(안)	조달청 요구(안)	비고
계약일	2010. 09. 17	2010. 09. 17
직전조정일(기준시점)	2013. 09. 01	2013. 09. 01
조정기준일(비교시점)	2017. 01. 31	2017. 01. 01
물가변동 경과기간	1,247일	1,217일
노무비 적용	2017. 01. 01	2017. 01. 01
생산자 물가지수 적용	2017. 01. 31	2017. 01. 01
적용 공정율	77.46%	76.29%
물가변동 적용대가	21,048,928,000	22,274,020,000
지수조정율	4.08%	2.84%
조정금액	858,796,000	-
검토결과	충족	미달

※ 생산자 물가지수 적용

- 시공사 제출(안) : 2017년 01월 발표지수 적용(총지수3.9)

- 조달청 요구(안) : 2016년 12월 발표지수 적용(총지수1.8)

4. 검토결과

가) 서울지하철9호선3단계 923공구 건설공사의 물가변동(4회)으로 인한 계약금액 조정요청에 대하여 조정기준일을 재검토한 결과(당초 : 2017.01.31, 변경 : 2017.01.01)

∘노무비 : 2017년 상반기(2017.01.01) 발표한 단가를 동일하게 적용

∘생산자 물가지수 :

- 시공사 제출(안) : 2017년 01월 발표한 생산자물가지수(총지수 102.17%) 적용

(적용기간 : 2017.01.31~2017.02.27)

- 조달청 요구(안) : 2016년 12월 발표한 생산자물가지수(총지수 100.85%) 적용

(적용기간 : 2016.12.31~2017.01.30)

나) 따라서 물가변동 조정기준일을 2017.01.01.로 적용할 경우 조정경과기간 90일 이상(1,217일)  으로 충족하나 지수조정율이 2.84%로 미달(100분의 3이상 되는 시점)됨을 보고합니다.

검토자 : 책임감리원   권  일  순 (인)