문서번호	역사문화재과-10677
결재일자	2017.6.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	역사문화재정책팀장	역사문화재과장
이훈영	김규리	06/14 정상훈

『서울무형문화재 북촌 교육전시장 보수공사 설계용역(계약명)』

계약기간 변경계획

2017. 6.

문 화 본 부

(역사문화재과)

『서울무형문화재 북촌 교육전시장 보수공사 설계용역(계약명)』

계약기간 변경계획

서울무형문화재 북촌 교육전시장 보수공사 설계용역(계약명) 추진 중 전문가 등 추가요청 사항을 반영하기 위해 과업기간을 연장하고자 함

□ 계약현황

○ 계 약 명 : 서울무형문화재 북촌 교육전시장 보수공사 설계용역

○ 계약기간 : 2017. 4. 28 ～ 2017. 6. 15

○ 계약금액 : 14,170천원(부가세 포함)

○ 계약업체 : ㈜연경당건축사사무소(대표 : 김성은)

□ 계약 변경내용

○ 계약기간 변경

- 당 초 : ‘17.4.28 ~ 6.15

- 변 경 : ‘17.4.28 ~ 7.25

○ 지체상금 부과여부 : 부과하지 않음

○ 변경사유

- 외부 전문가, 서울무형문화재 전수조교 등이 참여한 2차례(5.29, 6.7)자문회의 결과, 추가 요구사항 등을 설계용역에 반영하기 위해 용역기간의 연장 필요

- 시설과 건축물대장상 불일치 부분을 일치시키기 위한 행정절차 진행 등 추가기간 소요

□ 향후일정

○ ‘17. 6월 : 계약기간 변경 의뢰(역사문화재과 → 재무과)

○ ‘17. 7월 : 설계용역 준공 및 용역대가 지급

붙 임 : 합의각서 양식 1부.  끝.