문서번호	시설관리과-15998
결재일자	2017.6.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장	동부수도사업소장
박윤선	유광창	최명익	06/15 代한희균
협 조

건설폐기물 처리용역 설계변경 검토 보고

(2016년 중랑,동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역)

2017. 6.

동부수도사업소

(시설관리과)

건설폐기물 처리용역 설계변경 검토 보고

(2016년 중랑,동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역)

우리사업소에서 시행중인 「2016년 중랑,동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역(장기계속단가계약)」에 대하여 시공물량 변경사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경(2차,최종)을 시행하고자 합니다.

□ 용역 현황

○ 용 역 명 : 2016년 중랑,동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역

○ 계약기간 : 2017.01.01. ~ 2017.06.30. (총부기기간 2016.07.25. ~ 2017.06.30.)

○ 계약금액 : 금256,720,000원

○ 용역개요 : 건설폐기물 운반 5,775㎥, 건설폐기물 처리 11,247ton

○ 도 급 자 : 광일환경주식회사 대표 김명환

□ 설계변경 현황

○ 설계변경 사유

- 폐기물 처리 물량 증감 발생

- 폐아스팔트 처리 (「폐아스팔트 재생처리 관련 검토결과」(배수과-6236호(2016.07.13.))

○ 공사규모 변경 내역

구 분	건설폐기물 운반(㎥)			건설폐기물 처리(ton)			비 고
	당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
합 계	*****	*****	*****	******	******	*******	물량 증감
폐아스팔트(유대)	*****	*****	*****	*****	*****	*******
폐아스팔트(무대)				*****	*	*******
폐콘크리트	*****	***	*****	*****	*****	******
폐토석	*****	*****	*****	*****	*****	*******

○ 공사금액 공종별 변경 내역

구 분	금 액 (원)		증 감(원)	비고
	당 초	변 경
1. 폐기물 운반	**********	**********		물량 증감
아스팔트 폐기물 운반비	**********	**********	***********
콘크리트 폐기물 운반비	**********	**********	***********
폐토석 폐기물 운반비	**********	**********	***********
2. 폐기물처리수수료	***********	***********
폐아스팔트 폐기물 수수료	**********	**********	************
폐콘크리트 폐기물 수수료	**********	**********	***********
폐토석 폐기물 수수료	**********	**********	************

▶ 총 용역비(도급비)는 변경없으나 일부 공종(폐아스팔트 폐기물 수수료)이 3천만원 이상 증액

□ 조치 의견

○ 위와 같이 폐기물처리 물량 증감이 발생한 「2016년 중랑,동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역(장기계속단가계약)」에 대하여 「2017년 상수도사업 설계심사 추진계획」(재무회계과-835호, ’17.1.17.)에 의거 본부(재무회계과)로 설계변경 심의 의뢰코자 하며, 심의결과에 따라 설계변경 및 계약 시행코자 합니다.

◇ 계약금액 조정심사

- 심의기관 : 상수도사업본부 요금관리부(재무회계과)

- 대상기준 : 계약심사 대상 사업(용역포함) 중 도급비 10%이상 증액 시 또는
공종별 건당 3천만원 이상 증액시

- 관련근거 : 「2017년 상수도사업 설계심사 추진계획」(재무회계과-835호, ’17.1.17.)

붙임 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 물량산출서 1부.

3. 폐아스팔트 재생처리 관련 검토결과 1부.  끝.