투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	건설폐기물 처리용역 설계변경(전체4회,5차1회) 계약의뢰

우리본부에서 시행중인 「한강공원 나들목 증설공사 건설폐기물 처리용역(장기계속)」에 대하여 설계변경(전체4회, 5차1회)계약의뢰하오니, 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 한강공원 나들목 증설공사 건설폐기물 처리용역(장기계속)

나. 용역개요 : 낙천정, 옥수, 신청담나들목 폐기물처리

다. 용역기간 : 전체 ‘13.05.31 ~‘16.12.31

5차  ‘17.01.02 ~‘17. 6.30

라. 도 급 자 : 흥진환경주식회사  대표 임홍락

마. 설계변경사유 : 물량변동에 따른 내역변경

바. 설계변경 내역

(단위:원)

전 체(4회)			5차1회			비 고
당초	변경	증	당초	변경	증
173,000,000	176,650,000	3,650,000	9,950,000	13,600,000	3,650,000

아. 예산과목 :

-  한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강의 자연성회복 및 시민편의 개선,

한강접근체계개선, 한강공원 나들목 증설 및 개선, 시설비(401-01)

붙임 : 1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 설계변경 내역서(전체4회) 1부.

4. 설계변경 내역서(5차1회) 1부. 끝.

주무관	방호익		치수과장	06/16 代권혁제
협조자
시행	치수과-2242	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화	02-3780-0683	/전송	3780-0744	/		/	대시민공개