문서번호	도시철도설비부-7396
결재일자	2017.6.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	신호과장	도시철도설비부장
김동일	김영하	06/20 정찬웅

9호선3단계 신호분야 감리원 투입 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 6.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

9호선3단계 신호분야 감리원 투입 검토보고

서울지하철9호선 연장건설(3단계) 신호분야 감리원 투입계획을 검토하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		검토 배경

❍ 서울지하철9호선 연장건설(3단계) 공사현장 공정지연으로 인하여 감리원 투입이 당초 예상보다 늦게 투입됨에 따라

❍ 감리단에서 공사현장 진행공정 및 현장여건에 맞춘 감리원 투입계획 변경승인 요청에 대한 검토 보고임

* 관련공문 : 9호선연장건설(3단계) 시스템분야 감리원 투입계획 변경승인요청(9호선 3단계 시스템분야 감리단, 2017. 6. 7.)

Ⅱ		용역 개요

❍ 용 역 명 : 서울지하철9호선 연장건설(3단계) 시스템분야 전면책임감리용역

❍ 과업범위 : 9호선 3단계구간(종합운동장~올림픽공원~보훈병원) 시스템분야

- 연 장 9.14km, 정거장 8개소(변전실 3개소)

❍ 계 약 자 : 세종기술(주)외 2개사 공동수급

❍ 계약금액 : 2,902백만원(낙찰율 : 74.14%)

❍ 용역기간 : 2015. 1. 5. ~ 2018. 12. 15.

- 신호분야 감리투입 인원 : 고급 2명, 중급 1명

구 분	’15	’16	2017년												2018년
	11	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
고 급 (’15.11~’18.12)
고 급 (’17.1~’18.4)
중 급 (’16.6~’18.12)

Ⅲ		검토 내용

□ 고급감리원(1명) 연장투입 검토(’18. 5월~12월, 6개월)

❍ 고급감리원 투입기간

구 분	2017년												2018년
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
고급(당초)
고급(변경)

❍ 공정 주요일정

- ’17. 12월~’18. 6월 : 지상~차상신호 연계시험

- ’18. 7월~11월 : 종합시험운행

- ’18. 12월 개통

❍ 검토내용

- 주요일정 검토결과 ’17. 12월~’18. 11월까지는 신호 연계시험 및 종합시험운행이 진행되는 기간으로 가장 중요하고 바쁜 시기이며

- 9호선은 영업운전 노선으로 주간시험을 못하고 야간시험을 진행하여 운전시험 상황을 파악해야 하나, 당초 고급감리원 투입기간(’17. 1월 ~’18. 4월)에서는 1명이 빠지고 있는 상태임

- 이에 따라, 고급감리원 1명은 ’18. 12월까지 연장투입하여 현장에 원활한 공정이 진행될 수 있도록 변경하는 것이 타당함

□ 중급감리원(1명) 추가 투입 검토(’18. 3월~’18. 8월, 6개월)

❍ 중급감리원 투입기간

구 분	’16	2017년												2018년
	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
중급(당초)
중급(변경)
중급(추가)

❍ 검토내용

- 해당 업체는 감리원 미투입분(’16. 6월~’17. 6월)에 대한 금액보전을 위해 중급감리원 추가 투입을 요청하였다고 판단되며,

- 자체 검토결과 고급감리원을 연장투입 할 경우 감리원 3명(고급2, 중급1)이 투입되고 있으므로 중급(1명)을 추가 투입하는 것은 불가함

- 다만, 감리원 미투입분을 감액 할 경우 공기 연장 시 예산증액 확보가 어려워 이를 대비하기 위해 총차 감액보다는 현장 공정진행 상황에 따라 중급감리 추가 투입을 ’18. 11월 이후로 시기를 조정하고, 정상적 준공(’18. 12월) 시 감리 미투입 금액은 준공정산 하는 것이 적정

※ 중급감리원(1명)은 ’17. 7월초 투입예정임

Ⅳ		검토 결과

❍ 원활한 공정을 진행하기 위해 고급감리원(1명) 기간연장은 적정

- (당초) ’17. 1월 ~ ’18. 4월

- (요청) ’17. 3월 ~ ’18. 12월  * 현재 ’17. 3월부터 투입 중

⇒ (검토결과) ’17. 3월 ~ ’18. 12월 (6개월 연장)

❍ 중급감리원(1명) 추가 투입은 ’18. 11월 이후로 투입시기를 조정

- (당초) 투입 없음

- (요청) ’18. 3월 ~ ’18. 8월 (추가투입)

⇒ (검토결과) ’18. 11월 ~ ’18. 12월 (투입시기 조정)

Ⅴ		행정 사항

❍ 9호선 연장건설(3단계) 감리총괄인 송변전과에서 검토결과를 적의 판단 후 결과에 반영