문서번호	방재시설부-10555
결재일자	2017.6.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		조경시설과장	방재시설부장
정영미		신용우	06/20 남궁용
협조

『합정외 1개소 빗물펌프장 증설공사』

조경분야 실정사항 검토보고

2017. 6.

도시기반시설본부

(방재시설부)

『합정외 1개소 빗물펌프장 증설공사』

조경분야 실정사항 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는『합정빗물펌프장 증설공사』실정사항에 대하여 검토 및 조치계획을 보고드림.

Ⅰ		공 사 개 요

▢ 공 사 명 : 합정외 1개소 빗물펌프장 증설공사

▢ 위    치 : 마포구 합정동 196-4

▢ 규    모 : 토출용량 210톤

▢ 조경개요

- 스트로브잣나무 등 6종 33주, 회양목 등 2종 880주

- 앉음벽 등 6종

▢ 공사기간 : 2013.01.04. ～ 2017.07.31.

▢ 공 사 비 : 5,719백만원(조경 30백만원)

▢ 시 공 사 : (주)금강주택

▢ 감 리 사 : 서울특별시시설관리공단

Ⅱ		검 토 내 용

▢ 현장여건 변경 및 주민요구 사항 발생

○ 이중수문 주변 수목식재(마포구청)

- 도로에 인접한 이중수문 시설 이외는 나대지상태로 가로경관을 저해함

○ 펌프장과 교회 경계측변 단차완화 및 교회측 도시가스 및 상수도 점검을 위한 출입구 설치(교회측 요구)

- 신설 펌프장이 당초 포장도로면보다 낮게 설계 및 시공되어 교회 면의 하수관 등이 노출되어 미관을 저해함.

○ 현장 사무실 부지 지장수목 처리

- 현장 가설 사무실 설치로 기존 수목 제거가 불가피하여 선조치함

(서울특별시시설관리공단 공사감독1처-10156(2015.11.5)

○ 펌프장이 교회 등 주변 건축물과 인접하여 음지환경에 생육할 수 있는 수종 반영필요

- 당초설계 : 백목련 등 5종 32주, 회양목 2종 880주, 잔디 129㎡

▢ 신규비목에 대하여 시공사 설계단가 반영요구

○ 주민(이용자) 민원 및 현장여건 반영에 따른 시공변경으로 설계단가 반영요구

Ⅲ		검토결과

▢ 현장여건 변경 및 주민요구 사항 발생

○ 이중수문 주변 수목식재 반영

- 수목 추가식재 : 이팝나무 등 2종 20주, 사철나무 등 3종 450주

○ 펌프장과 교회 경계측면 단차완화 및 교회측 도시가스 및 상수도 점검을 위한 출입구 설치반영

- 조경석 쌓기(4~6목) : 46.713톤

- 휀스(H1200×W1800) 조정 : 16경간 → 15경간

- 출입문(H1200×W1800) 조정 : 1식 → 2식

○ 현장 사무실 부지 지장수목 처리

- 감나무 등 6종 11주, 철쭉 120주 제거

○ 펌프장이 교회 등 주변 건축물과 인접하여 음지환경에 생육할 수 있는 수종 반영

- 산수유 등 2종 6주, 화살나무 등 3종 370주, 맥문동 등 3종 8,700본 식재

▢ 신규비목에 대하여 시공사 설계단가 반영요청

○ 이용자 및 주민요구사항을 반영을 위하여 설계변경이 불가피하므로 신규비목에 대하여는 〔(100%+86.75%)〕×50/100의 협의율 적용

- 근거 : 기획재정부 계약예규 공사계약 일반조건 제19조의 50(발주기관의 필요에 의한 설계변경)

▢ 공사비 변경

○ 공사비 변경

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비고
조경공
	식재공	11,956,580	26,189,395	14,232,815
	시설물공	10,446,043	14,594,636	4,148,593
제경비		8,067,377	16,415,969	8,348,592
도 급 액		30,470,000	57,200,000	26,730,000
관급자재대		-	1,535,760	1,535,760
합 계		30,470,000	58,735,760	28,265,760

Ⅲ		보고자 의견

○ 상기 실정사항에 대하여 승인코자 하며 추후 설계변경에 반영코자 함.

붙 임 : 1. 관련공문 1부

2. 변경내역서 1부.  끝.