상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	북부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제목	비굴착 관 갱생(신기술) 시험시공 공사기간 연기 통보

1. 급수운영과-10980호(2017.5.18.)와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 비굴착 관 갱생(신기술) 시험시공과 관련하여 공사기간 변경에 대한 실정보고를 검토하고 아래와 같이 공사기간을 변경하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공사현황

○ 공 사 명 : 상계동747~중계동503-3호간 당현1교 비굴착 관 갱생 시험시공

○ 공사개요 : D=700mm, L=80m

○ 공사업체 : ************

○ 공사기간 : 당초 2017.5.22. ~ 2017.6.23.

변경 2017.5.22. ~ 2017.7.7.

붙임 : 당현1교 비굴착 관 갱생 시험시공 현장실정 검토 보고서 1부. 끝.

	북부수도사업소장
주무관	최호림		주무관	이승완		급수운영과장	06/21 장종욱
협조자
시행	급수운영과-13809	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로(번동) 935	/
전화	02-3146-3367	/전송	02-3146-3389	/	tig2r2000@seoul.go.kr	/	부분공개(7)