투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	수질TMS 측정기 통신규격 업그레이드 납품기한 변경 시행

1. 관리과-4906(2017.05.23.) 및 운영과-1960(2017.05.19.)「수질TMS 측정기 통신규격 업그레이드」와 관련입니다.

2. 위 대호 계약 건에 대한 납품기한을 아래 사유에 의거 변경코자 합니다.

가. 계약건명 : 수질TMS 측정기 통신규격 업그레이드

나. 계약금액 : 11,900,000원(금일천일백구십만원정)

다. 계약일자 : 2017.05.23(화)

라. 계약업체 : ㈜백년기술 [대표 김은희]

마. 계약변경내용

구 분	계약금액	납품기한
당 초	11,900,900	2017.05.23 ~ 2017.07.07
변 경	11,900,000	2017.05.23 ~ 2017.08.07
비 고	변경 없음	기간 연장

바. 지체상금 부과여부 : 부과 없음

사. 연기사유 : ㈜백련기술과 계약한 수질TMS 측정기 통신규격 업그레이드 납품기한이 2017.07.07로 되어 있으나, 우리 센터의 수질TMS 데이터로거 교체설치 일정을 고려하여 2017.08.07까지 기간을 연장, 납품받아 하수처리 운영이 원활하게 유지될수 있도록 하고자 함.

붙임 : 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	조정호		운영과장	김웅남		★난지물재생센터소장	06/23 정흥순
협조자	주무관	장인환		주무관	황재상
시행	운영과-2497	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)난지물재생센터 운영과	/
전화	02)300-8527	/전송	02)300-8544	/	bluesky001@seoul.go.kr	/	대시민공개