문서번호	공원녹지정책과-10955
결재일자	2017.6.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		문화비축기지운영TF팀장	공원녹지정책과장
이은진		이광준	06/27 최윤종
협조

준공기한 연장계획 보고

(공사명 : 문화비축기지 카페테리아 주방설비 공사)

2017. 6.

공원녹지정책과

(문화비축기지운영TF팀)

준공기한 연장계획 보고

(용역명 : 문화비축기지 카페테리아 주방설비 공사)

문화비축기지 개원이 미뤄짐에 따라 준비에 만반을 기하고자 준공기한을 연장하고자 함.

□ 공사개요

❍ 계 약 명 : 문화비축기지 카페테리아 주방설비 공사

❍ 계약업체 : 주식회사 건일씨엔에스

❍ 계약금액 : 금14,000,000원(금일천사백만원)

❍ 계약일자 : ‘17. 6. 14.

❍ 준공기한 : ‘17. 6. 14. ~ ‘17. 7. 3.

□ 준공기한 변경 계획

구분	변경전	변경후	비고
준공기한	‘17. 6. 14. ~ ’17. 7. 3.	‘17. 6. 14. ~ ’17. 7. 31.	28일 연장
계약금액	금 14,000,000 원	금 14,000,000 원	변경없음

❍  변경사유

− 푸른도시국장 주재 공정회의 결과 카페테리아 인테리어가 공간과 어울리지 않고 전체 이미지를 저해한다는 의견이 나와 이를 보완하기 위해 인테리어 설계 재검토를 추진중이므로 준공기한 연장이 필요함

− 준공기한을 연장함으로써 준비에 만전을 기하여 카페테리아 완성도를 높이고자 함.  끝.