투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(정산) 시행(서울대공원 노후 하수관로 정비공사-3차)

1. 현재 진행중인『서울대공원 노후 하수관로 정비공사(3차)』에 대한 설계변경을 아래와 같이 시행코자 합니다.

□ 설계변경

가. 공 사 명 : 『서울대공원 노후 하수관로 정비공사(3차)』

나. 도급금액 :****************

다. 공사기간 : 2017. 03. 16. ~ 2017. 8. 30.

라. 계약업체 :*****************

마. 설계변경내용

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고 (증 · 감)
** ******	***********	**************	************
*** ** ** *	***********	**************	************

바. 사    유

- 비굴착 전체보수 물량 증·감에 따른 변경

- 신규 공종 발생으로 물량 증․감에 따른 변경

- 보험료 등 실 정산에 따른변 경

사. 예산과목

- 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전, 공원안전시설 보수 및 정비, 시설비,

노후 우․오수관 개량 공사

붙임 :  1. 설계변경 사유서 1부

2. 변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

주무관	손영민		주무관	한상길		시설과장	공헌구		관리부장	06/27 代이행용
협조자	총무과장	이행용
시행	시설과-3739	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	500-7441	/전송	507-7230	/	sonym6974@seoul.go.kr	/	부분공개(5)