문서번호	공원운영과-10289
결재일자	2017.6.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	공원운영과장	서부공원녹지사업소장
홍우진	김병수	문근식	06/27 김종근
협 조

『경의선 숲길공원사무소』

커뮤니티센터 조명정비공사 추진계획

2017. 6.

서부공원녹지사업소

(공원운영과)

경의선 숲길공원사무소』

커뮤니티센터 조명공사 추진계획

『경의선 숲길공원사무소』커뮤니티센터를 북카페 등 공유공간 조성시 사업효과의 증대를 위해 조명 공사를 추진하고자 함.

Ⅰ		추진배경 및 방향

□ 푸른도시국장 지시 사항과 관련 업무 통보[공원녹지정책과-2219호(‘17.2.7)]

□ 경의선숲길 공원사무소 커뮤니티센터 조성계획 알림

[공원녹지정책과-6023호(‘17.4.6)]

□ 경의선 숲길공원사무소 커뮤니티센터 인테리어공사 추진계획

[공원운영과-9049(‘17.6.5)]

□ 인테리어 추진공사 중 설계자 등 관계자 회의 결과, 기존 조명은 업무용으로 커뮤니티센터 인테리어 사업효과가 저하될 것으로 우려되어 조명교체공사 추진 (조명교체공사시 기존 천정자재의 재활용이 어렵고, 효과가 저하되므로 천정 공사도 수반)

□ 조명은 북카페와 공유공간과 어울리고 이용자들에게 쉼과 나눔을 가질 수 있는 디자인등으로 선정

Ⅱ		공원사무소 현황

□ 위    치 : 경의선 공덕역 복합역사(공덕역 10번 출구 앞)

□ 조성근거 : 경의선 공덕역 철도역사 복합개발에 따른 공공기여

□ 규    모 : 총 955.97㎡ (옥상 8.88㎡, 지하1층 519.46㎡, 지하2층 427.63㎡)

Ⅲ		세부추진계획

□  사업개요

○ 위    치 : 공덕역복합역사 경의선 숲길공원사무소

○ 사업내용

- 조명교체에 따른 전기배선공사

- 천정자재 변경 및 도장 등

○ 사업기간 : 2017. 6. 27 ~ 2017. 7. 3.

○ 규    모 : 약200㎡

○ 소요예산 : 22백만원 (공사비 19백만원,조명구매 3백만원)

○ 예산과목

┌ 공사비 : 산하공원운영, 경의선숲길 공원유지관리, 시설비

└ 조명구매 : 산하공원운영, 경의선숲길 공원유지관리, 공공운영비

□ 공사추진방법 : 수의계약

○ 대상업체 : 금오이앤씨코리아(주) 대표 서성은

○ 추진근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제 25조 제1항

□ 조명구매 : 카드구매

□ 향후 추진일정

○ ‘17. 6. 26 : 공사발주

○ ‘17. 6. 27 ~ 7.3 : 공사착공 및 준공

Ⅳ		기 대 효 과

□ 조명 및 천정공사로 인테리어사업 효과 증대

□ 시민들에게 더욱 편안하고 아름다운 공간 제공

붙임 : 공사내역서 및 계획도.  끝.