문서번호	설비부-10741
결재일자	2017.6.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
백남진		임현근	전결 06/28 권오식
협조

설계변경(총차3회,2차1회) 검토보고

『서울시어린이병원삼성발달센터증축 전기공사』

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 06.

설계변경(총차3회,2차1회) 검토보고

『서울시어린이병원삼성발달센터증축 전기공사』

「서울시 어린이병원 삼성발달센터증축 전기공사」에 대하여 건설사업관리단으로 부터 설계변경 보고서가 제출되어 검토하고 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

□ 어린이병원전기공사 설계변경(총차3회,2차1회)보고:서도기-전-121(`17.06.20.)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 서울시어린이병원 삼성발달센터증축 전기공사

□ 공사규모 : 지하2층/지상5층 연면적11,950㎡ 전기설비 1식

□ 공사기간 : 2015. 04. 27. ~ 2017. 07. 14.

□ 공 사 비 : 1,194,050천원(도급비)

□ 시 공 사 : 길흥전기(주) 대표 이소순

□ 감 리 사 : (주)영화키스톤

Ⅲ		검토내용

□ 변경사유

현장여건 변경 및 설계누락 등 내역변경 사항으로 실정보고 승인에 의한 설계변경

□ 총 공사비 증・감 현황(총차 3회)

[단위 : 원]

구 분	변 경 전	변 경 후	증 ∙ 감	비 고
도급액	1,181,730,000	1,194,050,000	12,360,000	총차2회
	1,194,050,000	1,230,650,000	36,600,000	총차3회
합계			48,960,000	설계변경금액 (2차1회)

□ 도급비 증・감 현황(2차1회)

[단위 : 원]

구 분	변 경 전	변 경 후	증 ∙ 감	비 고
공 급 가 액	668,845,591	686,800,136	17,954,545
물가변동(ES)	-	26,554,546	26,554,546
부가가치세	66,884,559	71,335,468	4,450,909
도 급 액	735,730,150	784,690,150	48,960,000

□ 감리단 검토결과

설계변경(총차, 2차1회) 내역이 실정보고의 승인통보에 의한 수량산출 및 인건비 등 설계내역이 적합 함.

Ⅲ		검토결과

□ 설계변경(총차, 2차1회)과 실정보고 승인통보에 의한 수량산출 및 변경내역이 적합한 것으로 책임감리단으로부터 접수되어

□ 설계내역(총차 및 2차)에 따른 물량 증・감 사항에 대하여 설계변경하고자 함.

붙   임  1. 감리단 설계변경 요청 및 검토의견서  1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 원가관리시스템 검증확인 1부.   끝.