투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 기간연장 승인 통보(여의도 지하벙커 개선공사)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 도시기반시설본부 건축부-11000(2017.6.27.)호와 관련입니다.

3.  위 호와 관련하여 『교통신호기 원인자부담공사 공사기간 연장요청』에 대하여 아래와 같이 승인 통보하오니 공사품질 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 여의도 지하벙커 개선공사

나. 공사장소: 영등포구 여의도동 2-11

다. 원 인 자: 서울특별시 도시기반시설본부

라. 감 리 사: ㈜트래픽스

마. 시 공 사: ㈜수호건설

바. 변경내용 및 요청: 교통소통대책 수립, 동절기 도로굴착 통제기간 등

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
공사기간	2017.3.13 ~ 2017.6.13.	2017.3.13 ~ 2017.9.30.	109일 증

끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장),(주)트래픽스,(주)수호건설
주무관	고두규		주무관	정경성		기전과장	06/29 박재경
협조자
시행	기전과-8495	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동) 강서도로사업소 기전과	/
전화		/전송		/		/	대시민공개