문서번호	설비부-2940
결재일자	2017.2.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박경철		임현근	전결 02/23 권오식
협조

‘어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사(총차 및 2차)’

공사기간 연장 검토보고

2017. 02.

도시기반시설본부

설비부

‘어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사(총차 및 2차)’

공사기간 연장 검토보고

우리 본부에서 추진 중인 ‘어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사’ 관련, 공사기간 연장을 위한 건설사업단 검토내용을 검토하고 보고드림

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사

❍ 공사규모 : 지하2층/지상5층, 연면적 11,950㎡,

❍ 주요설비 : 공조·환기설비, 자동제어, 신재생에너지(지열) 및 소화설비 1식

❍ 공사기간 : 2015. 04. 15.~ 2017. 03.14.(총차)

2015. 04. 15.~ 2016. 10.31.(1차)

2015. 04. 15.~ 2017. 03.14.(2차)

❍ 공사금액 : 3,809백만 원(2차 2,549백만 원, 1차 700백만 원:기준공)

❍ 시 공 사 : 유엔아이건설㈜

❍ 건설사업단 : ㈜선진엔지니어링(기계), ㈜영화키스톤건축사사무소(소방)

2		관련근거

❍ ㈜영화키스톤건축사사무소 서도기-기-038: 총차 및 2차 공사기간 연장요청 보고

3		공사기간 연장내용

❍ 연장 사유

- 선행 공종(건축) 공기 연장에 따른 후속 공종인 기계설비 공사기간 연장

❍ 공사기간 연장내용

계약구분	계약금액(원)	공사기간		비고
		당 초	변 경
총 차	3,809,530,000	2015.04.15. ~ 2017.03.14.	2015.04.15. ~ 2017.05.30.	□ 계약금액 변경없음 □ 공기 77일 연장
2 차	2,549,711,000	2015.04.15. ~ 2017.03.14.	2015.04.15. ~ 2017.05.30.

❍ 공사기간 연장 귀책 기관 : 도시기반시설본부

❍ 지체상금 부과 여부 : 미부과

❍ 책임건설사업기술단 검토의견

- 선행 공종인 건축공사 공기연장으로 인한 후속 공정인 기계설비 공사기간을  조정하여 공사를 추진함이 타당하다고 판단됨.

4		조치의견

❍ 건설사업단의 검토보고 내용이 적정하다고 판단되므로, 현장 여건에 맞게   공사기간을 연장하여 공정 관리에 만전을 기하고자 함.

따로 붙임 : 공사기간 연장 관련 문서 1부.