문서번호	통계데이터담당관-7247
결재일자	2017.6.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	데이터인프라팀장	통계데이터담당관
최승아	代곽호진	06/30 안정준

『시민중심 빅데이터 공유활용 플랫폼 구축』

추 진 현 황 보 고(주간)

2017. 6.

통계데이터담당관

『시민중심 빅데이터 공유활용 플랫폼 구축』

추 진 현 황 보 고(주간)

『시민중심 빅데이터 공유활용 플랫폼 구축』사업의 5주차 추진현황을 아래와 같이 보고드림

▢ 사 업 명 : 시민중심 빅데이터 공유활용 플랫폼 구축

▢ 사업기간 : 2017.5.20 ~2017.12.20

▢ 사 업 자 : 위세아이텍 컨소시엄

▢ 추진실적 : 2017.6.21.~2017.6.27 (5주차/전체30주)

번호	작업구분명	진척률		비고
		계획	실적
전체 진척률		12.5%	12.5%
1	통합 BDW 구축	9.8%	9.6%
2	대시보드 및 OLAP 개발	6.1%	6.1%
3	오픈소스 도입	9.1%	9.1%
4	GIS 개발	19.9%	19.9%
5	상용대체DB 구축	13.5%	13.5%
6	시스템 기능 개선(UI/UX)	19.5%	19.5%
7	유지보수	16.0%	16.0%

▢ 차주 주요계획(6.28~7.4)

- 데이터 수집 및 활용을 위한 인터뷰                           : 6.27 ~ 7.30

- 서비스 구현관련 요구사항 정의 및 분석                       : 6.15 ~ 6.30

- 오픈소스 OLAP 시범구축을 위한 기구축시스템(교통사고) 분석 : 6.14 ~ 7.14

- 오픈소스 DBMS 이중화 테스트                               : 7.03 ~ 7.8

- 하둡솔루션 업그레이드를 위한 설치계획 수립                   : 6.28 ~ 7.7

- 상용대체 데이터 구축을 위한 유사데이터 현황(초안) 작성       : 6.28 ~ 7.7

붙임 1. 주간업무(5주차) 1부.

2. 지난 주간업무(1주~4주) 각 1부.     끝.