문서번호		안전치수과-8022		★주무관		하수관리팀장	안전치수과장		건설안전교통국장		부구청장		구청장
결재일자		2017.5.11.
				김근홍		장현준	함명수		김희동		오해영		05/11 박겸수
공개여부		부분공개
				협 조
					도로관리과장			김기용
보도여부
					굴착관리팀장			이은철
					주무관			전기훈
	『 서울시 긴급복구비 지원에 따른 』 하수관로 정비 예산집행 계획
2017.5.10.
강 북 구 (안전치수과)

『 서울시 긴급복구비 지원에 따른 』

하수관로 정비 예산집행 계획

우리구에서 시행중인 우이~신설 경전철 공사구간내 통수능 부족 하수관로 정비와 관련 서울시로부터 긴급복구비가 배정되어 우기 및 경전철 도로포장전 하수관로 정비의 시급성 등을 감안 『2017년 관내 하수시설물 정비공사(연간단가)』에 포함 신속히 집행하여 수해예방에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진경위

○ 2017. 4. 11. 보도정비공사 구간 내 통수능 부족 하수관로 정비사항 검토

○ 2017. 4. 13. 우이~신설 경전철 공사구간 내 보도정비공사(3공구)

일부구간 작업중지 요청(안전치수과→도로관리과)

○ 2017. 4. 25. 수해예방을 위한 긴급복구비 지원 요청(강북구→서울시)

○ 2017. 4. 28. 긴급복구비 예산재배정(100백만원, 서울시→강북구)

Ⅱ		추진계획

○ 추진기간 : ‘17. 5.

○ 사업예산 : 100백만원(시비)

○ 설치위치 : 우이동 68-1 ~ 우이동 100-4

○ 설치규모 : 하수관로정비(D=600mm → D=900mm 확대개량, L=67m)

Ⅲ		예산배정 현황

○ 예 산 액 : 100백원(시비)

○ 배 정 일 : 2017.4.28.

○ 용    도 : 하수관로 개량

○ 예산과목 : 물순환안전국 물재생계획과, 하수관로신설개량, 하수시설물

긴급복구 및 정비, 시설비(시비)

Ⅳ		현황 및 문제점

○ 우리구에서 시행중인 우이～신설 경전철 공사구간내 통수능 부족 하수관로  정비와 관련 경전철 도로포장(‘17.5월말 예정) 및 준공(‘17. 7월)에 차질이   우려되고 우기전 긴급정비로 수해예방이 필요한 실정이며,

○ 하수관로 정비대상 중 일부 보도굴착통제 저촉구간(‘16.12월 시공되어)이 있으며,

○ 별도 공사발주시 입찰 및 적격심사, 계약, 착공 준비 등에 상당한 시일(30일 이상)이 소요되는 실정임

Ⅴ		조치계획

○ 수해예방을 위한 통수능 부족 하수관로를 시급히 정비해야 하는 실정으로 사업구간내 일부 보도굴착통제 저촉구간(L=39m) 포함하여 하수관로 정비공사를 긴급시행코자 하며,

○ 조속한 하수관로 정비와 효율적인 예산집행을 위하여 금회 긴급복구비  예산을 우리구에서 기 시행중인 『2017년 관내 하수시설물 정비공사(연간단가)』에 보도포장을 포함하여 긴급정비 시행후 설계변경시 정산코자 함.

붙임: 1. 서울시 관련공문 1부.

2. 하수관로 개량 위치도(관망도) 1부.  끝.