동물복지 지원센터 조성 계획

반려동물이 늘면서 동물보호 정책 요구도 증가하고 있어 동물복지사업을 실질적‧체계적으로 추진하기 위해 동물복지지원센터를 조성하고자 함

1		추진 근거

□ 추진근거

○ 법적 근거 : 동물보호법 제4조 제2항, 동물보호조례 제21조, 제22조

○ 관련 방침

- 서울동물복지계획2020(′14.5.3)

- 동물보호청책제안에 따른 동물복지 추진계획(′15.9.1)

□ 추진경과

○′16.1~6월 : 서울연구원 동물복지지원시설 도입방안 연구

- 시설규모, 기능 및 운영에 대한 타당성 검토

○′16.5.10일 : 동물복지지원시설 도입방안 시민토론회

○′16.7~12월 : 동물복지지원시설 기본계획 수립 연구

2		조성 개요

○ 위    치 : 에스플렉스센터(마포구 매봉산로 31, 지하1층)

○ 규    모 : 591.3㎡(공용면적포함 총규모 1,476.58㎡)

○ 세부시설 : 동물병원, 긴급보호동물 인수 및 입양센터, 사무실

동물보호 교육장, 동물보호 커뮤니티룸 등

○ 총사업비 : 11억 5천만원(시설비 8억원, 장비구입 1.5억원, 운영비2억원)

3		세부조성계획

□ 동물병원

○ 역    할 : 위급한 유기동물 및 긴급구호동물 치료

○ 규    모 : 250㎡

○ 주요시설 : 검역실, 처치실, 수술실, 입원실(감염, 비감염, 개, 고양이 구분), 임상병리실, X-ray실, 약제·비품실, 안락사실, 동물미용실

○ 최대수용규모 : 동물 60마리

- 계류 및 검역실 15마리 (개 10마리, 고양이 5마리)

- 비감염동물 입원실 30마리 (개 20마리, 고양이 10마리)

- 감염동물 입원실 15마리 (개 10마리, 고양이 5마리)

□ 긴급 구호동물 인수 및 입양센터

○ 역    할 : 긴급 구호동물 인수 상담 및 상담, 자원봉사자 운영

○ 규    모 : 208.8㎡

○ 주요시설 : 상담실, 입양실(개, 고양이), 세탁실, 사무실

○ 최대수용규모 : 총 40마리(개 20마리, 고양이 20마리)

□ 동물보호 교육 및 지역 커뮤니티 플랫폼

○ 역    할 : 반려동물과 가족 대상 동물보호 및 동물사회화 교육,     지역 시민 및 단체를 위한 풀뿌리 동물보호 운동 지원

○ 규    모 : 132.48㎡

○ 주요시설 : 일반교육실, 사회화 교육실, 개별 상담 및 커뮤니티룸

- 일반교육실과 사회화 교육실은 가변형 칸막이로 구획

○ 교육인원 : 150명(반려동물 동반시 20가족)

4		추진 일정

○′17. 2월    : 동물복지지원센터 조성계획 수립

○′17. 2월    : 기술용역 타당성 심사(동물복지지원센터 설계용역)

○′17. 2~3월 : 동물복지지원센터 기본 및 실시 설계

○′17. 4~6월 : 동물복지지원센터 조성, 운영계획 수립, 장비 구입

○′17. 7월    : 동물복지지원센터 개관

5		조성 방법

○ 동물복지지원센터 설계 및 공사 : 자체 수행하되 전문기관에 감리의뢰

- 동물용 공조시설, 바닥 및 벽체 방수 등 전문성을 요하는 공정을 포함하고 있어, 공사 관리 등을 전문기관에 의뢰하여 사업의 품질 향상

※ 동물의 냄새, 소음 등으로 인한 인접 시설의 피해 예방을 위해 전문기관의 참여 필요

○ 대학 동물병원 등 유사기관 벤치마킹하고 전문가 자문 실시

6		조성 예산

○ 산출금액 : 800,000천원(국비 300,000천원)

- 설계 및 공사  790,000천원(국비 300,000천원)

- 시설부대비 10,000천원

○ 예산과목 : 동물보호과, 선진형 동물보호시스템 구축, 동물보호 및 복지수준

향상, 동물복지지원시설 조성사업, 시설비(79천만원), 시설부대비(1천만원)