투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 기간연장 승인 통보 [잠원2빗물펌프장 신설공사(자연방류관로)]

1. 방재시설부-11019(2017.06.27.)호와 관련입니다.

2. 도시기반시설본부에서 시행하고 있는『잠원2빗물펌프장 신설공사(자연방류관로)교통안전시설물(노면표시) 설치공사』원인자부담 공사와 관련하여

다음과 같이 공사기간 변경을 승인하오니,

3. 원인자는 『원인자 준수사항』 및 『노면표시 시방서』에 의거 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바라며, 유관기관에서는 본 승인 통보내용을 참고하시기 바랍니다.

가. 변경사항

공 사 명	구 분	시공업체			공사기간
		설계사	감리사	시공사	당초	변경
잠원2빗물펌프장 신설공사 (자연방류관로)	노면표시	㈜동림TNS	㈜동림TNS	우리피엔알	공사승인일～17.05.31.	공사승인일～17.07.15.

나. 변경사유

- 부대공사 미비에 따른 준공기한 연기.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	윤수정		주무관	송광석		도로보수과장	07/06 代송광석
협조자
시행	도로보수과-6744	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 (대치동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0356	/전송	02-2040-0307	/	crystal420@seoul.go.kr	/	대시민공개