투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	한국전력공사 강동송파지사장 귀하, (주)엘지유플러스 대표자 권영수 귀하, 에스케이텔레콤(주) 대표자 박정호 귀하, 드림라인(주) 대표자 김형석 귀하
(경유)
제목	전주 지중화 및 긴급이설 요청

1. 귀사의 공헌에 감사드리며 무궁한 발전을 기원합니다.

2.『서울지하철 9호선 3단계 922공구 출입구 등 설치』공사구간 내 저촉되는 지장전주(통신포함) 이설과 관련하여 당초 가공주 이설(가이설+본이설)을   지중화(둔춘주공 출입로 포함)로 변경 시행코자 하오니 설계 내역서 등 관련 서류를 제출해 주시기 바라며, 이에 따른 공사비 증·감에 대해서는 공사 완료 후 정산할 예정임을 알려드립니다.

3. 또한 본 공사는 공정이 촉박하여 지하철 9호선 3단계 개통(‘18. 10월)에 차질을 초래 할 수 있어 지중화 긴급이설 요청드리니 금월 중순내로 이설 완료될 수   있도록 특단의 대책을 강구하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	서재원		주무관	문병종		토목2과장	방영복		도시철도토목부장	07/06 김진팔
협조자
시행	도시철도토목부-8574	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96) 프리미어플레이스 9층	/
전화	02-772-7125	/전송	02-772-7306	/	seojw83@seoul.go.kr	/	대시민공개