“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	문화체육과-20486		주무관	문화산업팀장		문화체육과장		복지문화국장
			주미규	김하성		이진우		전결 07/06 강현섭
등록일자	2017.7.5.
결재일자	2017.7.6.
공개구분	대시민공개
			협조자

소제목입력부분

구립 못골 어린이 도서관 개보수 공사실시 계획

□ 공 사 명 : 구립 못골 어린이 도서관 개보수 공사

○ 소 재 지 : 강남구 자곡로7길 3(자곡동 607)

□ 추진경위

○ LH공사에서 건립한 자곡동 전통가옥을 우리구로 인계함에 따라 주민이 원하는 어린이 도서관 및 독서프로그램을 운영하기 위해 전통가옥 개보수

□ 공사범위 : 구립 못골 한옥어린이 도서관 운영

○ 사랑채(108.20㎡) → 인성교육 프로그램실(소규모 회의실 등) 개조

○ 안  채(168.75㎡) → 도서관 및 열람실 개조

○ 곳간채(48.02㎡)  → 독서프로그램(멀티미디어실) 개조

○ 원적당 철거 등

□ 공사내용 : 실시설계도서 및 시방서 참조

□ 시설공사

○ 소요예산 : 548,202,060원

○ 사업기간 : 총 90일

○ 발주방법 : 조달청 공개경쟁입찰(긴급)

2017. 06.  .

	강 남 구
(		문화체육과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 도서관법 및 동법 시행령 • 서울특별시 강남구 도서관 설치 및 운영조례 등
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 자곡동 607번지 전통가옥(한옥)을 활용한 도서관의 시설구조 개선에 대한 방향을 모색하고자 함.
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	•근거 및 기준을 검토한 결과 적정함
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 강남구민 및 도서관 이용자
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ○ ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ○ ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ○ ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ○ ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 추진 일정 및 업무처리 흐름도 명시
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 종로구 전통가옥(한옥) 활용 도서관 현장 방문(2017. 1. 6) - 청운문학도서관, 무계원, 통인어린이작은도서관
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 2017.2.8. 도서관 운영위원회 자문

구립 못골 한옥 어린이 도서관 개보수공사

LH공사에서 건립한 세곡동 전통가옥이 우리구로 인계됨에 따라 주민이 원하는 어린이 도서관 및 독서프로그램으로 운영하기 위해, 전통가옥 개·보수 공사를 추진하여 운영에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		근 거

□ 관련법령

○ 구립 못골 한옥 어린이도서관 운영 계획(문화체육과 11510-2017.4.14)

○ 서울특별시 강남구 도서관 설치 및 운영조례 등

Ⅱ		추진사항

□ 2013.04.11. : 전통가옥 건축공사 완료(LH공사)

□ 2014.11.17. : 한옥어린이도서관 활용 건의(못골주민81명→LH)

□ 2016.12.16. : 주민설명회 개최-한옥 어린이도서관으로 선정확정

□ 2017.04.10. : 한옥 어린이 도서관 시설개선비 청구(강남구→LH)

□ 2017.04.14. : 한옥 어린이 도서관 시설개선비 확보(LH→강남구)

□ 2017.04.19. : 전통가옥 인수·인계 및 시설물 이관(공원녹지과→강남구)

□ 2017.04.24. : 한옥 어린이도서관 설계용역 추진(수의 계약)

□ 2017.05.26. : 전통가옥 소유권 이전중(LH→강남구)

□ 2017.06.07. : 한옥 어린이 도서관 설계용역 준공 검수

Ⅲ		공사개요

□ 공 사 명 : 구립 못골 한옥 어린이 도서관 개보수

□ 공사대상 : 구립 못골 한옥 어린이 도서관

구립 못골 한옥 어린이 도서관	위 치 도
○ 위 치 : 자곡로7길3(자곡동 607) ○ 규 모 - 대지 : 21,560.9㎡(약 6,533평) - 건물 : 372㎡(약 113평) - 구조 : 지상1층, 5개동 한식목구조 (안채, 사랑채, 문간채, 곳간채, 사모정)

□ 공사기간 : 착수일로부터 90일

□ 공사범위 : 한옥 어린이 전용 도서관 운영

○ 사랑채(108.20㎡) → 인성교육 프로그램실 개조

○ 안  채(168.75㎡) → 도서관 및 열람실 개조

○ 곳간채 (48.02㎡) → 독서프로그램실 개조

○ 원적당 철거 등

□ 공사내용 : 실시설계도서 및 시방서 참조

Ⅳ		세부 추진계획

□ 공사분야

○ 총공사비 : 548,208,060원

- 건축,기계 : 458,934,350원

- 전기,소방 :  33,332,000원

- 통     신 :  49,169,710원

- 감리 용역 :   6,772,000원

※ 설계용역에 따른 산출금액임

□ 건축/기계 공사

○ 발주일시 : 2017. 7월중

○ 계약방법 : 공개경쟁입찰 입찰(긴급)

○ 공사금액 : 458,934,350원

- 건축/ 기계 공사 : 454,327,000원×1식=454,327,000원(공개경쟁입찰)

- 관급자재 :   4,607,350원×1식=4,607,350원(조달청 구매)

※ 전통가옥은 금속 창호가 아니라 한식 목재 창호이므로 관급자재    구매 불가하여 4급자재 사용

○ 입찰참가자격

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조에 의한 자격을 갖춘 업체

- 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 주된 영업소가 서    울특별시에 소재하고 건설산업기본법에 의한 시설물유지관리업 면    허를 등록한 업체로서 건축분야 건설기술자를 보유한 업체

□ 전기/소방 공사

○ 발주일시 : 2017. 7월중

○ 계약방법 : 공개경재입찰 입찰(긴급)

○ 공사금액 : 33,332,000원

- 전기/소방 공사 : 33,332,000원 × 1식 = 33,332,000원(공개경쟁입찰)

○ 입찰참가자격

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조에 의한 자격을 갖춘 업체

- 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재하고 전기공사업법에 의한 전기공사업, 소방시설공사업법에 의한 전문 또는 일반소방시설(전기분야)공사업 면허를 등록한 업체

- 면허보완을 위하여 공동도급(분담이행)이 가능하며, 이 경우 전기공사업체를 공동수급 대표자로 하고, 대표자 포함하여 2개사 이내로 구성하여야 함

□ 통신 공사

○ 발주일시 : 2017. 7월중

○ 계약방법 : 공개경재입찰 입찰(긴급)

○ 공사금액 : 49,163,710원

- 통신 공사 : 14,313,000원 ×1식 = 14,313,000원(공개경쟁입찰)

- 관급 자재 : 34,856,710원×1식=34,856,710원(조달청 구매)

○ 입찰참가자격

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조에 의한 자격을 갖춘 업체

- 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재하고 정보통신공사업법에 의한 정보통신공사업 면허를 등록한 업체

□ 감리발주

○ 발주일시 : 공사 발주 시

○ 계약방법 : 수의계약

○ 감리금액 : 6,772천원

○ 업 체 명 : 다솜건축사사무소

(대표자:민경철, 강남구 학동로20길 54,대양빌딩 3층)

Ⅴ		소요예산

□ 소요예산 : 548,208,060원

○ 공사비 : 541,436,060원

[단위: 원]

분 야	구 분	금 액	비고
건축/기계	공사비	454,327,000
	관급자재비	4,607,350
전기/소방	공사비	33,332,000
	관급자재비	-
통신	공사비	14,313,000
	관급자재비	34,856,710
총공사비		541,436,060

○ 감리비 : 6,772천원

□ 예산과목

○ 세입세출외현금

Ⅵ		행정사항

□ 공사 및 감리 계약의뢰 -----------------------------------------------  재무과

○ 관급자재: 조달청 구매

□ 공사감독 -------------------------------------------------- 건축과