문서번호	건축과-16882		주무관			건축시설팀장			건축과장	도시관리국장
결재일자	2017.7.7.		김태환			이태기			유옥현	07/07 신석용
공개여부	대시민공개
			협조
방침번호

『강남어린이집 대수선 전기 및 전기소방공사』

준공기한 변경(연장) 검토보고

연기사유 : 선행공종인 건축공사 준공기한 연기에 따른 후속공정인 전기 및 전기소방 준공기한 연장 변경

준공기한 변경내역

구 분	당 초	변 경	비 고
준공기한 연기	2017.01.09 ~ 2017.07.17	2017.01.09 ~ 2017.07.31	연장 14일

연기사유 귀책소재 : 동작구청

지체상금 부과여부 : 미부과

도시관리국

(건 축 과)

『강남어린이집 대수선 전기 및 전기소방공사』

준공기한 변경(연장) 검토보고

우리구에서 시행중인 『강남어린이집 대수선 전기 및 전기소방공사』 의 준공기한 연기에 대한 검토사항을 아래와 같이 연기 조치코자 함.

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 강남어린이집 대수선 전기 및 전기소방공사

위    치 : 광진구 자양로22길 88

규    모 : 지하1층/지상4층, 연면적 623.8㎡

계 약 자 : ㈜대영전설  대표 김문영

공사기간 : 2017.01.09 ～ 2017.07.17

계약금액 : 금111,611,010원

Ⅱ		준공기한 변경(연장) 검토

변경근거

- 『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』제14장 제7절2(계약기간의 연장)

- 건축과-16703(2017.07.05) 건축공사 계약기간 변경 검토보고

변경사유 : 선행공종인 건축공사 준공기한 연장에 따른 후속공종인 전기 및 전기소방공사 준공기한 연장 변경

준공기한 변경 현황

- 계약기간 : 총 14일 연장

구 분	당 초	변 경	비 고
준공기한 연기	2017.01.09 ~ 2017.07.17	2017.01.09 ~ 2017.07.31	연장 14일

- 귀책소재 : 동작구청(계약대상자의 책임없는 사유)

- 지연배상금 : 미부과

Ⅲ		조 치 의 견

위 내용과 같이 준공기한을 변경(연장) 시행코자함.

2017. 7.

보고자 : 지방공업주사  김태환