문서번호	도로관리과-13749			★주무관		도로팀장		도로관리과장		건설안전교통국장
결재일자	2017.7.10.
				김균성		이동호		김기용		전결 07/10 김희동
공개여부	대시민공개
				협 조
보도여부
		- 우이동광장 주변 도로구조개선공사 - 현장실정 검토 보고
2017.7.10.
강 북 구

- 우이동광장 주변 도로구조개선공사 -

현장실정 검토 보고

“우이동광장 주변 도로구조개선공사” 방학로 선형변경 구간의 기존 복개구조물 상부 도로포장 기층재 처리에 대하여 현장실정을 검토하여 보고드림

공사개요

○ 공 사 명 : 우이동광장 주변 도로구조개선공사(2차)

○ 공사기간 : 2016. 11. 28. ~ 2017. 7. 31.

○ 규    모

- 도로구조개선 폭 16m  연장 130m

- 도로정비  폭 30~35m  연장 150m

○ 도 급 자 : 재덕건설(주)  대표 최민욱

○ 도 급 비 : 금234,306,310원

현장 실정 및 검토내용

○ 기존 복개구조물 상부 도로포장 기층재 처리 검토

- 방학로 선형변경구간의 기존복개구조물 횡단구간은 당초 복개구조물 상부에 아스팔트포장으로 설계되어 있으나 원활한 노면배수를 위한 종단구배 조정(삼양로 방향으로 일괄 조정) 및 설계된 횡단구배(편구배 약 6%)를 준수 할 경우 복개구조물과 포장면 사이의 기층공간이 확대됨.(평균높이 30cm)

- 기존 복개구조물 상부(콘크리트스라브)에 일반적인 혼합골재를 사용할 경우 다짐부족으로 향후 포장면 변형이 우려됨에 따라 기층재를 재생아스팔트를 사용하고자 함.

소요 자재량 및 예산 : 11,242천원

○ 복개구조물 상부 포장면적

- 복개구조물 및 접속스라브 면적 : 23.0m * 13.5m = 310.5㎡

- 평균 포장두께 : 30cm

- 기층재 소요량 : 310.5㎡ * 0.3m * 2.35 = 219톤

○ 순환골재 단가 :  톤당 51,060원(BB-2, #467 기층용)

⇒ 51,060원 * 219톤 = 11,182,140원 + 60,380원(조달수수료) = 11,242,520원

조치계획

○ 위 현장실정에 대해서는 선시공토록 조치하고 추후 설계변경 정산코자 함.  끝.