＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신	구로구청장(치수과장)
(경유)
제목	설계변경 심사 요청 반려(오류4배수분구 하수관거 종합정비사업-6차분)

1. 치수과-10984(‘17.6.30)호와 관련하여, 설계변경심사 요청한 『오류4배수분구 하수관거 종합정비사업』에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

- 아    래 -

가. 설계변경심사는 설계변경을 하기 전에 계약심사부서에서 설계변경의 적정성을 검토하는 것을 말하며,

나. 설계변경심사 제외대상 사업은 사업부서에서 이미 계약상대자와 협의하여 우선 시공을 한 설계변경으로 설계변경심사의 실효성이 없는 경우와 그밖에 사업부서에서 계약특성상 설계변경심사를 하는 것이 적정하지 않다고 판단되는 경우로서 계약심사부서와 사전 협의하는 경우로 한정하고 있음.

다. 위 공사는 현장조사 결과 이미 상당부분(KT옆천변로 관로터파기 및 배면보강 그라우팅완료, 노후관거 비굴착 전면보수 22% 완료) 시공이 완료된 상태에 있어 설계변경심사의 실익이 없는 것으로 판단되어 반려하며,

- 추후 설계변경 대상사업은 설계변경을 하기 전에 설계변경심사를 요청하여 주시기 바람.

라. 아울러 설계변경 심사요청 서류를 검토한바 그라우팅 천공은 실사를 거쳐 확정한 서울형품셈을 적용하도록 안내[계약심사과-174(‘17. 1. 4), -5238(‘17. 3.13)]한바 있으나, 이를 적용하지 아니하고 임의품셈을 적용하였는바, 자체 설계변경시 서울형품셈[토목부문 토공 2. 그라우팅(약액주입용)지반천공]을 적용 바람.

첨 부 : 서울형품셈 안내공문 사본 2부.  끝

	서 울 특 별 시 장
주무관	류근호		토목심사팀장	김종호		계약심사과장	07/11 代최광운
협조자
시행	계약심사과-13201	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서울시청 서소문별관 제1동 9층)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-2133-3333	/전송	02-2133-1032	/		/	대시민공개