문서번호	역사도심재생과-9066
결재일자	2017.7.12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		다시세운관리팀장	역사도심재생과장
김태현		이광구	07/12 양병현
협조

세운상가군 재생사업 공공공간 국제현상공모 관리용역 준공기한 연기 보고

2017. 7.

도시재생본부

(역사도심재생과)

세운상가군 재생사업(삼풍상가~남산순환로) 공공공간 국제현상공모

관리용역 준공기한 연기 보고

세운상가군 재생사업(삼풍상가~남산순환로) 공공공간 국제지명현상설계공모 당선작 발표(‘17.6.1.) 이후 공공공간 기본 및 실시설계 용역 설계계약과 관련 당선자*************와 추가 과업 등의 문제로 설계계약 협상이 지연됨에 따라 추가 과업기간이 필요하여 준공기한을 연기하고자 함.

용역개요

❍ 용 역 명 : 세운상가군 재생사업(삼풍상가~남산순환로) 공공공간 국제현상공모 관리용역

❍ 용역기간 : 2017.3.17. ∼ 2017.7.16.

❍ 계약금액 : 금82,826,900원

❍ 계 약 자 : ********

추진내역

❍ ’17.02.10 : 국제지명현상공모 관리용역 및 설계용역 추진방침

❍ ’17.03.17 : 용역계약 및 착수

❍ ’17.03.20 : 국제지명현상공모 공고(’17. 3. 20. ~ ’17. 5. 24.)

❍ ’17.03.29 : 1차 현장설명회 /‘17.04.05 2차 현장설명회

❍ ’17.04.18 : 용역착수 보고

❍ ’17.05.17 : 용역중간 보고

❍ ’17.05.24 : 작품접수

❍ ’17.05.25 : 기술심사(8층 간담회 1)

❍ ’17.05.26 : 본 심사(시민청 지하2층 위크숍룸)

❍ ’17.06.01 : 당선작 발표*************

❍ ’17.06.13 ∼ 06.22 : 작품전시(시민청 지하1층 시티갤러리)

❍ ’17.07.10 : 기본 및 실시설계 용역계약 의뢰

준공기한 연기

❍ 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경
용역기간	’17.3.17. ∼ ’17.7.16.	’17.3.17. ∼ ’17.9.16.
계약금액	82,826,900원	변경없음

❍ 귀책사유 : 없음

❍ 지체상금 부과 여부 : 미부과

❍ 연기사유

- 세운상가군 재생사업(삼풍상가~남산순환로) 공공공간 국제지명현상설계공모 당선작 발표(‘17.6.1.) 이후 공공공간 기본 및 실시설계 용역 설계계약과 관련 당선자*************와 추가 과업 등의 문제로 설계계약 협상이 지연됨에 따라 위와 같이 준공기한을 연기하고자 함.

조치계획

❍ 변경계약 체결 의뢰(재무과)

향후계획

❍ ’17.07.    : 용역최종 보고

❍ ’17.08.    : 작품집 제작

붙임 : 1. 준공기한 연기 의뢰서 1부

2. 합의각서 1부.  끝.