문서번호	도로보수과-6917
결재일자	2017.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
최완		07/14 이근봉
협조

2017년 관내포장도로 불량맨홀정비공사 작업지시(2차) 추진 보고

2017. 7.

북부도로사업소

[도로보수과]

2017년 불량맨홀정비공사 작업지시(2차) 추진

공사현황

공 사 명 : 2017년 관내 포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)

공사개요 : 불량맨홀 정비 538개소

공사기간 : 2017.03.13 ~ 2017.12.31

도 급 비 : 490,000,000원

도 급 자 : (주)옥련건설 대표 김정옥

보고내용

관련근거

⇒ 포장도로 평탄성확보를 위한 불량맨홀정비 추진계획보고(도로보수과-3906, 2014. 5. 9)

⇒ 2016년 맨홀관리 및 정기점검 계획(도로보수과-8513, 2016. 9. 6)

⇒ 불량맨홀정비공사 작업지시(2차)에 따른 사전협의(도로보수과-6286, 2017.06.28)

불량맨홀정비 현황(2017. 7. 14일 기준)

- 1차 작업 : 대상 218개소

- 2차 작업 : 대상 244개소

누  계  : 462개소(완료 218개소)

금회 작업내용

- 2017년 하반기 맨홀관리 및 정기점검 계획에 따라 우선 정비대상인 D,E급(외관조사) 대상으로 평탄성 확보가 시급한 불량맨홀에 대하여 우선적 작업지시로

차량 안전사고 예방 등 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

· 관내 노후포장도로 정비공사시 노면단차로 매몰된 맨홀

· 각종 불량맨홀로 발생된 민원 처리

· 맨홀주변 파손, 침하 등으로 평탄성 확보가 시급한 불량 맨홀

- 불량맨홀 주변의 광범위한 파손으로 보수가 필요한 구간은 도로보수를 선행후  (자체 직영반 보수) 맨홀 정비

- 맨홀관리기관에 대하여는 현장확인 및 정비여부와 맨홀 뚜껑․받침(철개) 지원    협조요청, 정비완료후 맨홀정비비 12월경 일괄부과 예정임을 통보

※ 맨홀뚜껑 파손 및 철개노후가 심하여 교체 필요시 맨홀관리기관에 지원요청

작업지시 분야별 구별 현황

구 분	계	종로구	성북구	강북구	도봉구	노원구
합 계	244	22	129	9	3	81
하수도	89	7	22	3	-	57
상수도	72	13	43	5	1	10
전 기	4	1	1	-	2	-
통 신	72	1	59	1	-	11
소화전	5	-	4	-	-	1
도시철도	2	-	-	-	--	2

조치계획

상기 보고내용과 같이 불량맨홀에 대하여 유관기관 관리부서에 사전 업무협의

하고 결과에 따라 『2017년 관내 포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)』  업체에

작업지시(2차)하고자 함.

⇒ 2차 작업기간 : 2017. 7. 17 ~ 2017. 9. 15

불량맨홀정비공사 작업내용에 대하여는 향후 예산범위내에서 설계변경 및 정산

처리 하고자 함.

따로붙임 : 불량맨홀정비공사 작업지시(2차) 1부.    끝.