문서번호	배수과-5832
결재일자	2017.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
김형식		이병운	07/14 이규상
협조

2017년 상반기

배수관 소블록 물세척 추진실적 보고

2017.  7.

상수도사업본부

(급 수 부)

2017년 상반기

배수관 소블록 물세척 추진실적 보고

2017년 상반기 배수관 소블록 물세척 추진 실적을 아래와 같이 보고 드림.

□ 사업 개요

○ 대  상 : 배수관 D=80~350㎜, L=7,766㎞(2,037개 소블록)

○ 기  간 : ’12년 ~ ’19년(총 사업비 91억원, ’17년 16억원)

○ 내  용 : 소블록 단위 시멘트라이닝 주철관 물때 제거

양방향 물세척 시행

전

중

슬라임

< 물흐름방향 및 유속 변동에

따른 수도관내부 상태 >

□ 2017년 추진실적(상반기)

○ 배수관 물세척 목표 : 420개 소블록

○ 월별 추진 현황

구분	목 표 (소블록)	추진실적(4~6월)			수질검사
					탁도 (0.5NTU이하)		잔류염소 (0.1㎎/L이상)
		개소	연장 (㎞)	세척수량 (㎥)	전	후	전	후
소 계	420	198	76.19	55,808	0.14	0.08	0.08	0.10
4월	53	50	20.43	9,600	0.42	0.21	0.21	0.27
5월	52	73	28.23	23,331	0.35	0.23	0.21	0.25
6월	53	75	27.53	22,877	0.35	0.23	0.19	0.25

○ 수도사업소별 추진 현황

(단위 : 소블록)

구 분	합계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목 표	420	53	53	52	52	53	53	52	52
실 적	198	38	26	20	19	21	28	24	22
세척 연장(㎞)	76.19	13.21	9.76	14.68	6.05	8.02	9.67	5.63	9.17

□ 향후 계획

○ ’17. 11월까지 배수관 물세척 완료(’17년 목표 420개 소블록).

붙임 : 2017년 배수관 물세척 추진실적(수도사업소별 세부 내역). 1부. 끝.