준공기한 연기 의뢰서

1. 계약내용

가. 공  사  명: 사근고개 걷고 싶은 거리 조성공사

나. 계약금액: 금450,468천원

다. 계 약 자: 이든공영 주식회사 대표이사 이홍직

라. 계약년월일: 2015. 7. 22.

마. 착공년월일: 2015. 7. 27.

바. 준공기한: 2017. 7. 25.

2. 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기 : 2017. 12. 31.

나. 연기 귀책소재 : 성동구청

다. 지체상금부과 대상 여부 : 미부과

라. 연기사유

-  본 공사의 동일 구간 내 ‘사근동길 전기 및 통신선로 지중화 공사’ 추진에 따른 본 공사의 절대공기 부족으로 준공기한 연기가 불가피함.

2017.  7.

토목과장    박 주 완   (인)

성동구(분임)재무관  귀 하