문서번호	토목과-8651
결재일자	2017.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		도로관리팀장		토목과장		안전건설교통국장
최우람		백원기		박주완		07/18 김재겸
협조

★ ◉

'사근고개 걷고싶은 거리 조성공사'

준공기한 연기 검토 보고

2017. 7

	성 동 구
	(토 목 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 ☑ 공약(약속)사업 ☑ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통·갈등 분야 고려사항		●	구민			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	갈등발생요인			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 ☑ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 □ 유지비용 □ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	기업	:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:	유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

'사근고개 걷고싶은 거리 조성공사'

준공기한 연기 검토 보고

‘사근고개 걷고싶은 거리 조성공사’ 의 원활한 사업추진을 위하여 공사 준공기한을 연기하고자 합니다.

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명: 사근고개 걷고싶은 거리 조성공사

기    간: 2015. 7. 27. ~ 2017. 7. 25.

규    모: 보도블록 포장 정비 21a, 도로경계석 및 측구 정비 1,090m

아스팔트 포장 정비 43a, 수목식재(왕벚나무 26주)

도 급 액: 450,468천 원

도 급 자: 이든공영 주식회사 대표이사 이홍직

Ⅱ		준공기한 연기사유

본 공사의 동일 구간 내 ‘사근동길 전기 및 통신선로 지중화 사업’ 추진에 따른 절대공기 부족으로 준공 연기가 불가피함

공사 준공기한 연기에 따른 추가 소요예산: 해당없음

Ⅲ		조 치 계 획

아래와 같이 공사 준공기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

- 당초: 2017. 7. 25. 까지 → 변경: 2017. 12. 31. 까지

- 준공기한 연기 귀책 계약당사자: 성동구청

- 지체상금 부과 여부: 미부과

붙임  준공기한 연기 의뢰서 1부.