문서번호	시설관리과-19517
결재일자	2017.7.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
박윤선	유광창	07/18 최명익
협 조

건설폐기물 처리용역 설계변경 검토 보고

(2016년 중랑,동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역)

2017. 7.

동부수도사업소

(시설관리과)

건설폐기물 처리용역 설계변경 검토 보고

(2016년 중랑,동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역)

우리사업소에서 시행중인 「2016년 중랑,동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역(장기계속단가계약)」에 대하여 물량 변경사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경(2차,최종)을 시행하고자 합니다.

□ 용역 현황

○ 용 역 명 : 2016년 중랑,동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역

○ 계약기간 : 2017.01.01. ~ 2017.07.21. (총부기기간 2016.07.25. ~ 2017.07.21.)

○ 계약금액 : 금256,720,000원

○ 용역개요 : 건설폐기물 운반 5,775㎥, 건설폐기물 처리 11,247ton

○ 도 급 자 : 광일환경주식회사 대표 김명환

□ 설계변경 현황

○ 설계변경 사유

- 폐기물 처리 물량 증감 발생

- 폐아스팔트 유대처리(「폐아스팔트 재생처리 관련 검토결과」(배수과-6236호(2016.07.13.))

○ 공사규모 변경 내역

구 분	건설폐기물 운반(㎥)			건설폐기물 처리(ton)			비 고
	당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
합 계	*****	*****	*****	******	******	******	물량 증감
폐아스팔트(유대)	*****	*****	*****	*****	*****	*******
폐아스팔트(무대)				*****	*	*******
폐콘크리트	*****	*****	*****	*****	*****	******
폐토석	*****	*****	*****	*****	*****	******

○ 공사금액 공종별 변경 내역

구 분	금 액 (원)		증 감(원)	비고
	당 초	변 경
총 금액	***********	***********	************	*****
1. 폐기물 운반	**********	**********
아스팔트 폐기물 운반비	**********	**********	***********
콘크리트 폐기물 운반비	**********	**********	***********
폐토석 폐기물 운반비	**********	**********	***********
2. 폐기물처리수수료	***********	***********
폐아스팔트 폐기물 수수료	**********	**********	************	본부 심사완료
폐콘크리트 폐기물 수수료	**********	**********	************
폐토석 폐기물 수수료	**********	**********	************

▶ 폐아스팔트 폐기물 수수료 증액분 중 34,023천원에 대해서는 「2017년 상수도사업 설계심사 추진계획」(재무회계과-835, ’17. 1. 17.)에 의거하여 심의 완료

□ 조치 의견

○ 위와 같이 설계변경 사항에 대하여 타당성 여부 등을 심의하여 반영하고자 우리 사업소 설계변경 심사위원회 개최 후 그 결과에 의거 설계변경을 시행하고자 합니다.

붙임 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 물량산출서 1부.

3. 계약금액조정 결과 통보 1부.

4. 폐아스팔트 재생처리 관련 검토결과 1부.  끝.