＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	기술용역 설계변경에 따른 계약 의뢰

1. 동남권사업단-7417(2017. 7.17.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 시행중인 「영동대로 지하공간 복합개발을 타당성조사 및 기본계획 수립용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경에 따른 재계약을 의뢰하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 영동대로 지하공간 복합개발을 위한 타당성조사 및 기본계획수립 용역

나. 용역기간 : 2016. 7.22 ~ 2017. 7.31

다. 계 약 자 : ㈜동명기술공단 외 6개 업체

라. 설계변경사유 : 과업구간 증가 및 지반조사 정산

마. 설계변경 내역

(단위 : 천원)

구 분		금 액			비 고
		당 초	변 경	증·감
총 용 역 비		1,450,780	1,570,490	증 119,710
용역비	공급가액	1,318,891	1,428,532	증 109,641
	부가가치세	131,889	141,958	증 10,069
	계	1,450,780	1,570,490	증 119,710

바. 예산과목 : (2017년 지역발전본부 동남권사업단) 도시재생 및 공공개발, 광역교통시설특별회계, 국제교류복합지구 공간 육성, 영동대로 지하공간 복합개발, 시설비(119,710천원)

붙임 1) 설계변경 방침서 1부.

2) 변경합의각서(PDF) 1부.

3) 설계변경 내역서 1부.  끝.

	동남권사업단장
★주무관	송병훈		조성사업팀장	이정화		동남권조성반장	07/19 김용학
협조자
시행	동남권사업단-7482	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩5층 동남권조성반	/
전화	2133-8269	/전송	2133-0741	/	songyechan@seoul.go.kr	/	대시민공개