문서번호	토목부-15287
결재일자	2017.7.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
이상욱A		이동훈	07/20 김영수
협조

사토장 변경 검토 보고

(서울역 7017 프로젝트 건설공사 접속부)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7.

도시기반시설본부

(토 목 부)

사토장 변경 검토보고

(서울역 7017 프로젝트 건설공사 접속부)

『서울역 7017 프로젝트 건설공사 접속부』의 사토장 변경에 대한 검토 보고임

1		관련근거

▢ 서울역(건)제17-307(‘17. 5.12.) : 사토장 변경 실정보고

2		공사개요

▢ 공 사 명 : 서울역 7017 프로젝트 건설공사(보행환경개선 공사)

▢ 공사 위치 및 규모

위 치	연장	토목	조경	비고
퇴 계 로 (회현역5번~7번출구)	250m	차로축소, 교차로개선, 보도포장	가로수 제거 및 식재, 벤치 조성
만리재로 (고가접속부~만리1구역)	300m	지중화, 보도정비	가로수 제거 및 식재, 벤치 조성
청 파 로 (코레일앞~중림동삼거리)	800m	보도정비 (투수블럭 포장)	수목보호판 설치

▢ 공사기간 : 2016. 10. ~ 2017.10.30.

▢ 총공사비 : 금  3,230,142천원

▢ 시 공 사 : 홍익산업개발(주)외 1개사

▢ 감 리 사 : ㈜진우엔지니어링외 3개사

3		보고내용

○ 본 공사의 사토는 수도권매립지로 반출토록 설계되어있으나, 수도권매립지관리공사에서 사토반입을 거부하므로 신규 사토장을 재선정한 시공사의 실정보고는 타당하며, 선정된 사토장의 운반거리의 증가에 따라 운반단가가 증가되나 시공사의 의견을 수용하여 단가 변경없이 사토장을 변경하고자 함

〈사토장 변경 현황〉

구 분	당 초	변 경		비고
위 치	수도권매립지 (인천 서구 검안 경서동)	경기 양평군 용문면 다문리	경기 양평군 개군면 하자포리
운반거리	59km	66km	65km
용 도	매립용	농경지성토
잔토처리 단가	21,238원/[eqn: m ^{3}]	30,959원/[eqn: m ^{3}]

〈사토장 변경 위치도〉

당 초(수도권매립지)	변 경(경기 양평군)

〈공사비 현황〉

(금액단위:천원)

구 분	단위	수 량		금 액		증 ․ -감
		당초	변경	당 초	변 경
토사운반(퇴계로)	㎥	13	13	276	406	130
토사운반(만리재로)	㎥	588	588	12,488	18,373	5885
직접공사비				12,764	18,779	6,015
제잡비				3,672	5,221	1,549
공급가액				16,436	24,000	7,564
부가가치세				1,644	2,400	756
도 급 비				18,080	26,400	8,320
※ 변경단가 적용시 8,320천원 증액되나 단가 변경없이 사토장을 변경하겠으며 사토 수량은 추후 정산하겠음(홍익17-177호, 2017.07.05)

Ⅳ		조치계획

○ 수도권매립지로의 반출이 불가함에 따라 사토장을 변경은 적정하며

○ 사토장 변경으로 인한 운반거리 및 운반단가는 미 반영하고 우선 반출토록하고 추후 설계변경시 반영하고자함.

붙 임 : 감리단 검토 의견서 등 1부.  끝.