문서번호	설비부-12500
결재일자	2017.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
이호기		여인웅	07/20 권오식
협조

『서남물재생센터 총인처리시설 기계설비공사』

관급자재 설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.  7.

도시기반시설본부

(설  비  부)

『서남물재생센터 총인처리시설 기계설비공사』

관급자재 설계변경 검토 보고

「서남물재생센터 총인처리시설 기계설비공사」과 관련하여 “서울지방중소기업청”의 공사용자재 직접구매제도 이행 권고에 따라 관급자재 변경 사항에 대한 검토 보고임

1		공사개요

▢ 공 사 명 :『서남물재생센터 총인처리시설 기계설비공사』

▢ 공사규모 : 총인처리시설 737,000㎥/일

▢ 공 사 비 : 금4,478,436,096원(1차 333,994,000원)

▢ 공사기간 : ‘17.6.16~20.02.15(1차 17.6.16~17.12.31)

▢ 시 공 사 : 대윤환경(주)

2		관련근거

▢ 공사용자재 직접구매제도 이행 권고[공공판로지원과-1341(2017.7.6.)]

- 공사건에 공사용자재 직접구매 대상품목이 포함되어 있는 것으로 판단 시정 요청

공고번호	공 고 명 (공사명)	총공사비	추정가격	직적구매대상품목 (물품분류번호)	비고
조달청 시설 20170515548 -00호	서남물재생센터 총인처리시설 기계설비공사	4,675백만원	124백만원	버터플라이밸브 (40141620)
			69백만원	탈수및배수장치 (47101525)

3		설계변경 내용

▢ 변경품목 및 금액                                    (단위 : 원)

구 분	사급→관급변경	관급→사급변경	증 감	비고
품목	버트플라이밸브 2종	스프르트펌프 외 12종	도급비 감)14,962,402	순공사비 기준
금액	101,233,209	86,270,807

※ 탈수 및 배수장치 1식(69백만원)은 기존 원심탈수기(30㎥/hr 2기)의 이설으로

제어반, 워크웨이, 샌드위치 판넬포함이므로 설계서 대로 사급자재로 적용.

▢ 변경사유

- 서울지방중소기업청 공공판로지원과 공사용자재 직접구매 이행권고

- 공사용자재 직접구매(분리발주) 제도

공공기관은 적용대상 공사중 공사용자재 직접구매 대상품목으로서 소요되는      자재의 추정가격이 3,000만원 이상인 경우 직접구매 의무화

▢ 단가의 적용

- 사급 → 관급변경 단가 : 계약단가(단, 조달예산 부족시 계약심사 단가)

- 관급 → 사급변경 단가 : 협의단가 적용(78.8%)

[계약심사 절감율 7.95% + 낙찰율차 13.25 = 21.2% 감액 적용]

4		보고자 의견

○ 서울지방중소기업청 공사용자재 직접구매제도 이행권고의

- 버트플라이밸브(40141620)은 사급자재를 관급자재로 변경하고

- 탈수및배수장치(47101525)는 기존시설의 이설이므로 설계대로 사급으로 적용

○ 공사용자재 직접구매제도 적용내용에 따라

관급자재로 설계된 추정가격이 3,000만원 미만인 스프르트펌프 등 13개 품목은 사급자재로 변경하고, 적용단가는 협의단가 78.8%를 적용함이 타당하다고 사료됨

○ 자재 변경내용에 대하여 우선 변경 시행토록 시공사에 업무지시하고

추후 설계변경시 상세내용 반영코져 합니다.

붙임 : 1. 공사용자재 직접구매제도 이행 권고 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 자재 변경내용 1부. 끝.