문서번호	도로관리과-12187
결재일자	2017.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로안전시설팀장	도로관리과장
오광원		김유찬	07/21 배광환
협조
	주무관		이옥휘

‘17년 하반기 방음시설 유지관리 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7

안전총괄본부

(도로관리과)

‘17년 하반기 방음시설 유지관리 추진계획

노후, 파손된 방음시설을 정비하여 최상의 상태로 기능을 유지하여 안전사고를 미연에 방지하고 도시경관을 개선하여 정온하고 쾌적한 도시환경 조성하고자 함.

□ 개   요

○ 위 치 : 특별시도 간선도로

○ 사업내용

- 방음벽 신설 : 1개소

- 방음벽 개량 : 1개소

- 방음벽 보수보강 : 4개소

- 실시설계 : 2개소

○ 공사기간 : ‘17.1.1. ~ 12.31(하반기 ‘17.7.24.~12.31.)

○ 소요예산 : 2,253백만원

- 상반기 2,143백만원.  하반기 110백만원

□ 상반기 추진현황

○ 노들길 방음벽 설치 : 높이 7.0m, 연장 450m, 소요예산 1,800백만원

- 실시설계중(‘17.3.~9.)     - 방음벽 설치(‘17.9.~12.)

○ 방이초등학교 방음벽 개량 : 높이 5.0m, 연장 140m, 소요예산 320백만원

- 조달청 자재구매 요청(10월 준공예정)

○ 문정초교외 2개소 방음판 정비 : 44[eqn: m ^{2}], 소요예산 20백만원

- 조달청 자재구매 요청(10월 준공예정)

○ 홍은동 5-52 방음판 교체공사 : 8[eqn: m ^{2}], 소요예산 2.5백만원

- 연간단가업체에 작업지시(8월 준공예정)

□ 하반기 추진계획

○ 신청현황

구 분	신청내용	규 모	소요예산 (천원)	비 고
계			110,000
성 북 구	월곡중학교 방음벽 재설치	- 높이 6.5m - 연장 164m	84,000 -실시설계 : 20,000 -설치공사 : 64,000	실시설계 및 재설치공사(1차) ※연차사업시행(‘17~’18년)
광 진 구	광장현대5단지 아파트 방음벽 설치	- 높이 8m - 연장 80m	26,000 -용역비 : 20,000 -측량비 : 6,000	실시설계

○ 검토의견

- 월곡중학교 석축정비에 따른 학생들의 안전성 확보 및 정온한 면학분위기 조성을 위해 방음벽 재설치가 필요한 실정임(‘17~’18년 연차사업시행)

- 올림픽대교 하부도로 교통 소음으로 인한 주민생활 불편해소를 위해 방음시설 설치가 필요한 실정임(‘17년 실시설계, ’18년 설치공사)

현황 사진
월곡중학교 방음벽 재설치	광장현대5단지아파트 방음벽 설치

□ 예산배정 계획

○ 총  괄

(단위 : 천원)

시행부서	예 산 액	예산배정 및 집행현황				비고
		계	기배정액	금회배정액	잔 액
배정현황	2,252,761	2,252,500	2,142,500	110,000	261

○ 상반기 집행현황

(단위 : 천원)

시행부서	예 산 액	예산배정 및 집행현황				집행잔액	비 고
		소 계	기배정액	금회배정액	집행액
소 계	2,252,761	2,142,500	2,142,500	-
서부도로사업소		2,500	2,500	-	-	2,500
남부도로사업소		1,800,000	1,800,000	-	400	1,799,600
송파구 도로과		340,000	340,000	-	-	340,000

○ 하반기 재배정 계획

(단위 : 천원)

시행부서	예 산 액	신 청 액	예산배정 현황				비고
			소 계	기배정액	금회배정액	잔 액
소 계	2,252,761	110,000	110,000	-	110,000	261
성북구 도로과		84,000	84,000	-	84,000	-
광진구 도로과		26,000	26,000	-	26,000	-

□ 행정사항

○ 상기와 같이 예산을 배정하여 방음시설 유지관리에 철저를 기하고자 함.

- 배정일자 : 2017.07.21.(예정)

- 배정부서 : 성북구 도로과, 광진구 도로과

- 배정금액 : 110백만원(성북구 : 84백만원, 광진구 : 26백만원)

- 예산과목 : 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물 관리, 방음시설 설치 및                보수보강, 시설비 및 부대비, 시설비   끝.