문서번호	도시철도사업부-7831
결재일자	2017.7.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신교통1과장	도시철도사업부장
원길묵		김종상	07/21 박동룡
협조	주무관		임병길
	주무관		신익현

신림선 도시철도 민간투자사업

전면책임감리용역(2공구) 발주계획 검토보고 (제2차)

2017. 7.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

신림선 도시철도 민간투자사업

전면책임감리용역(2공구) 발주계획 검토보고 (제2차)

「신림선 도시철도 민간투자사업」전면책임감리용역(2공구) 계약자인 ㈜유신 외 2개사로부터 접수된 제2차 계약요청 관련 발주계획 보고임

※ 관련근거 : ㈜유신 감리17-669호('17. 7. 13.)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(2공구)

○ 위    치 : 104S 환기구(농심앞) ~ 105정거장 (보라매공원) ~ 차량기지(보라매공원)

○ 용역대상 : 1,142m (정거장 1개소, 환기구 1개소, 차량기지 1개소)

○ 감 리 사 : ㈜유신 외 2개사

○ 계약현황

(단위 : 천원)

구 분	계 약 기 간	계 약 금 액	비 고
총 차	'11. 11. 01 ~ '22. 03. 07	3,141,829
1 차	'11. 11. 01 ~ '17. 07. 28	335,379	준공 예정

□ 발주계획

○ 과업기간 : '17. 7. 29. ~ '18. 3. 19.

○ 계약금액 : 291,621천원

(단위 : 천원)

계약금액(계)	공급가액	부가가치세	손해배상 공제료	비 고
291.621	261,110	26,111	4,400

○ 과업내용 : 신림선 도시철도 민간투자사업(2공구) 전면책임감리(토목, 건축분야)

○ 예산과목

- 신교통수단도입, 경전철 건설사업, 신림선 경전철 건설, 시설비 및 부대비, 감리비(도시철도특별회계)

○ 계약방법 : 장기계속공사(용역)

○ 감리원 투입계획

분 야	직 책	등 급	투입 계획 (2차)	비 고
토 목	책임감리원	수석감리사	'17.07.29~'18.03.19.	7.8개월
	보조감리원	감리사	'17.07.29~'18.03.19.
	보조감리원	감리사보	'17.07.29~'18.03.19.

□ 검토결과

○ 상기 검토내용과 같이「신림선 도시철도 민간투자사업(2공구)」의 원활한 사업 및 공정 추진을 위해 전면책임감리용역(2공구) 제2차를  시행코자 함

붙  임  1. 감리단 공문(관련서류) 1부.

2. 설계 내역서(제2차) 1부.  끝.