문서번호	보도환경개선과-9816
결재일자	2017.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		보도관리팀장	보도환경개선과장
김낙현		오재섭	07/25 권완택
협조
	보도정책팀장		장상규

보도 공사장 특별 점검 결과 보고

2017. 7.

안전총괄본부

(보도환경개선과)

보도 공사장 특별 점검 결과 보고

’17년 준공 및 시행 중인 보도 공사장에 대한 ‘보도블록 10계명’ 이행 사각지역 해소를 위한 주요 보도 공사장 특별 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 점검 개요

○ 점검기간 : ’17.06.15. ~ 07.17.

○ 점검대상 : ’17년 시행 및 시행 중인 보도 공사장 34개소

○ 점 검 반 : 보도관리팀, 보도정책팀, 지하도상가팀

□ 점검 결과

○ 중점 점검사항

- 보도블록 정밀시공, 전체턱낮춤(턱낮춤 0cm화) 시행 여부

- 측구(경계석) 파손, 구배불량 등 배수처리 이상 유무

- 점자블록 설치 규정 준수 여부

- 보도 침하(구조물 주변 등), 평탄성 불량 유무

- 그 외 보도블록 설계시공 매뉴얼 등 지침에 따른 안전 및 품질관리

○ 지적 사항

시행기관	소 계	안전관리	품질관리				기 타
			보도블록	점자블록	경계석, 측구	구조물주변
종로구 도시개발과 외 13부서	31	3	13	9	4	-	2 (안내표지판 내용 미흡 등)

□ 조치 계획

○ 보도 공사장에 대한 점검 지적사항은 해당 자치구에 통보하여 정비토록 조치

붙임 : 1. 보도 공사장 특별 점검 결과 1부.

2. 보도 공사장 특별 점검 사례 1부.  끝.