문서번호		건강증진과-9222		주무관		질환예방팀장		건강증진과장		보건소장
결재일자		2017.7.27.
				나진희		김미향		박현정		07/27 이인영
공개여부		대시민공개
				협 조	건축과장		박우성
보도여부
					정보화지원과장		代정재옥
					보건위생과장		박순종
	강북구 스탬프 힐링투어 『너랑 나랑 우리랑』스마트헬스존[건강조은] 공사 계획
2017.7.24.
강 북 구 (건강증진과)

- 강북구 스탬프 힐링투어「너랑 나랑 우리랑」-

스마트헬스존(건강조은) 공사 설치  계획

강북구 스탬프 힐링투어 ‘너랑 나랑 우리랑’ 사업의 효과적 추진을 위한 스마트헬스케어존 설치를 함에 있어 전문기술과 경험을 갖춘 전문업체와 계약을 통해 사업 추진에 만전을 기하고자자 함

Ⅰ		추 진 근 거

구청장 방침(문화체육과-13930호, 2017.5.19.)

강북구 역사․문화․관광 스탬프 힐링투어 ‘너랑 나랑 우리랑’ 추진계획

건강증진과-6780(2017.6.5.)호, 강북구 스탬프 힐링투어 ‘너랑 나랑 우리랑’

스마트헬스투어서비스 계획

Ⅱ		공 사 추 진 개 요

공사명 (2개 부문)

○ 실외 컨테이너 하우징 공사 부분: 건강상담 실외 하우징(가건축물) 공사

○ 건강상담실 내부 공사: 건강관리를 위한 키오스크 설치 공사 및 내부                         인테리어 공사

용역기간: 계약일~ 스마트헬스존 공사 완료시까지(8월 중순 예정)

계약방법: 총액방식 수의계약

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정자치부 예규 제88호) 제5장 제2절 및 제3절

선정방식: 전문업체 시장조사(견적서 및 제안서) 후 적합한 우수업체와 계약

Ⅲ		주 요 공 사 내 용

실외 컨테이너 하우징 공사 부분: 건강상담 실외 하우징 공사

○ 실외 컨테이너 하우징 공사

- 건강 측정 및 너랑나랑우리랑 힐링스탬프 투어 사업의 홍보를 동시에 겸한          하우징 디자인 필요

- 창호, 출입문 설치 공사

○ 단열 공사: 바닥, 벽, 단열 공사

○ 바닥 공사 및 먼지털이 에어건 이동 공사

○ 외부 페인트 및 마감

건강상담실 내부 인테리어 공사

○ 주민건강관리 건강상담실 설치

- 대상자 자가관리 웹 및 모바일 앱과 관리자의 상담 관리를 위한 서비스 운영          시스템 구축

- 건강 정보 제공 및 관리에 필요한 내부 실내 인테리어 설계

○ 전기공사

- 실내 전기 사용 계량기 설치 공사

○ 통신공사

- 키오스크 연동 및 웹, 앱 건강상담 관리에 필요한 인터넷 통신 공사

○ 내부 냉난방기 설치 공사

Ⅳ		추 진 일 정

2017. 7.  3~ 7.  20      업체 시장조사 및 제안서 검토

2017. 7.  12 ~ 7. 25     계약심사 의뢰 및 조치

2017. 7.  25 ~ 7. 26    적정업체 선정 및 수의계약 체결

2017. 7.  26 ~ 8. 15     건강부스 공사 및 내부 실내 공사 시행

2017. 8.  15  ~          건강상담실 시범 운영

2017. 8. 21 ~           정상 운영

Ⅴ		소 요 예 산

소요예산: 35,000천원(구비)

○ 실외 컨테이너 하우징 공사: 20,000천원 이하

○ 건강상담실 내부 공사: 20,000천원 이하

예산과목: 건강증진과,  구민건강증진,  만성질환 예방,  스마트헬스투어 서비스사업,            시설비 및 부대비, 시설비

Ⅶ		행 정 사 항

정보화지원과: 인터넷 통신 설치 관련 지원

건축과: 실외 컨테이너 하우징 공사 관련 지원

보건위생과: 용역 계약 체결.  끝.