문서번호	정수시설과-2760
결재일자	2017.8.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김종원		김긍채	08/02 임철수
협 조
	주무관			함인석

2018년 사업계획

응집 침전지 벽체 및 트라프 보수공사

2017.  8.

2018년 사업계획

응집 침전지 벽체 및 트라프 보수공사

노후된 응집․침전지의 벽체와 트라프를 보수하여 정수센터 견학 및 방문객에게 깨끗한 수돗물 생산공정 홍보로 음용율 향상에 기여하고, 내구성을 증진하여 시설물의 안정성을 확보하기 위함

1		현 황

□ 사업근거

○ 법령상 근거

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법

○ 기타근거(방침,지침)

- 음용율 향상을 위한 정수센터 이미지 개선 계획(2011.04.20)

□ 사업개요

○ 규  모 : 정수장 생산시설 1,000천톤/일

○ 사업내용 : 1계열 5,6지 및 4계열 1,2지(응집·침전지 및 트라프 보수)

○ 사업기간 : 2018. 4 ~ 11.

○ 사 업 비 : 980,000천원

○ 보수실적 및 계획

구분 정비대상	실적(정비완료)						계 획
	소계	2013	2014	2015	2016	2017	소계	2018	2019
24지	16지	3지	2지	4지	3지	4지	8지	4지	4지

※ 3계열 : ’13~14 완료 / 2계열 :’15~16 완료 / 1계열 1~4지 : ‘17시행 중

□ 예산편성 개요

○ 개 요

구 분	2018 예산(안)	2017 예산	증 감	산 출 내 역
기타 교체비	980,000	950,000	30,000	- 응집침전지 벽체단면보수 : 6,000㎡ x 163천원 = 980,000천원

○ 편성사유

- 정수센터 견학 및 방문객들에게 깨끗한 수돗물 생산에 대한 홍보로 응용율 향상에 기여

- 노후 되고 있는 응집·침전지 벽체의 내구성을 증진하여 시설물 안전확보

- 도장의 박락과 변색된 트라프의 내구성 향상과 이미지 개선

벽체 보수공사 전	보수전 벽체
벽체 보수공사 후	벽체 보수공사 후

2		조치계획

□ 2018년 예산반영

○ 사 업 명 : 응집 침전지 벽체 및 트라프 보수공사

○ 사업내용

- 응집·침전지 및 트라프 : 4개지(1계열 5,6지, 4계열 1,2지)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비)

○ 추진일정별 계획

- 2018. 2. : 설계

- 2018. 3. : 심사 및 발주

- 2018. 4. ~ 11.  : 공사 착공 및 준공. 끝