복     명     서

결재	아동친화도시팀장	여성가족과장	복지환경국장
	도순심	윤혜경	08/03 안춘자

시설 노후화로 증・개축 기능보강공사중인 아동양육시설 남산원의 공사장을 방문하여 공사진행상황 등 현장 점검을 실시하고 아래와 같이 복명합니다.

2017. 8. 2.

복명자 : 행정6급           성명 : 도순심

복     명     내     용

점검일시

2017. 8. 2.(수) 15:20∼16:20

건    명

아동양육시설 남산원 기능보강사업 현장점검 실시

- 점검자 : 복지환경국장, 여성가족과장, 아동친화도시팀장 등

내용

□ 진행사항

- 외벽 조적공사 완료, 내부 계단 미장 진행중(당일 인원 총 17명)

- 지붕공사와 천장공사 완료, 화장실 타일 시공 진행중

- 8.2.(수) 외벽 비계 철거

□ 독려사항

- 공사 현장 직원들의 여름 휴가로 공사 지연되지않도록 독려

- 8.15.(화) 예정준공일까지는 공사 끝낼 수 있도록 당부

- 8.1.(화)부터 시설에서 여름 캠프 진행중으로 시설물 안전 및

아동 안전 부문 관리 철저 당부

□ 현장 사진(외벽비계철거 전후)

8.1.(화) 철거 전	8.2.(수) 철거 후	내부공사

참고

총소요액	국고보조	시비	자부담
1,560,520천원	755,260천원	755,260천원	50,000천원