문서번호	동북권사업단-7838
결재일자	2017.8.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	동북권미래사업팀장	동북권사업반장	동북권사업단장
김남천	김해룡	한병준	08/04 이정화

창동상계 동서간 연결도로 기본계획(구상) 수립용역 준공기한 연기 보고

2017. 8.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

『창동․상계 동서간 연결도로 기본계획(구상) 수립』

용역 준공기한 연기 보고

『창동․상계 동서간 연결도로 기본계획(구상) 수립 용역』과 관련하여 보행교량 변경, 주변교통 및 관련규정을 검토하여 계획에 반영코자 준공기한을 연기하고자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 :  창동․상계 동서간 연결도로 기본계획(구상) 수립용역

○ 용역기간 : 2016. 3. 7. ~ 2017. 8. 6.

○ 용 역 사 : ㈜다산이엔지  대표자 이 상 헌

○ 계약금액 : 금일억칠천사백사만사천팔백원정(￦174,044,800)

○ 과업 주요내용

- 현황 및 관련계획 조사 / 교통량, 환경, 지장물 등 조사

- 교통영향 분석 및 교통처리 방안 등 / 한전 철탑 지중화 사업 검토 등

- 노선계획〔지하차도 및 동서간 연결도로(교량 3개소) 노선 선정〕

□ 그간 추진사항 (현재 공정율 약 98%)

○ ‘16. 3. 3.	: 용역 계약

○ ‘16. 3. 9.	: 착수계 제출

○ ‘16. 4.~7.	: 도시재생활성화계획 검토회의(4회)

○ ‘16. 8.~11	: 용역 중간보고 및 전문가 자문회의

○ ‘17. 2. 10.: 용역 추진사항 보고

○ ‘17. 4.~6. : 교량 및 지하차도 타당성조사 분석

□ 용역 연기사유 (귀책사유 : 서울시)

○ 보행교량 위치에 대한 보차도교량으로 변경 가능여부를 검토하고

교량변경에 따른 주변교통 및 관련규정 검토 등 검토사항이 발생되어

○ 과업이행에 따른 절대기간 부족으로 준공기한 연기가 필요함.

□ 용역 연기내용

○ 용 역 비 : 174,044,800원 (변동 없음)

○ 용역기간 : (당초) ‘17. 8. 6. →  (변경) ’17. 9. 29.

○ 지체상금 : 미부과

□ 용역비 집행 현황

(단위 천원)

‘16. 예산	계약금액	기 지출액	지출예정액	비 고
200,000	174,044	165,105	8,939

□ 향후 일정

○ ‘17.  8.	: 용역 준공기한 연기 요청 및 변경계약 체결

○ ‘17.  8.	: 용역 최종보고

○ ‘17.  9.	: 용역준공.  끝.