문서번호	한양도성도감-7592
결재일자	2017.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	도성보존팀장	한양도성도감과장		문화본부장
협 조

한양도성 인왕․백악 성벽 붕괴구간

보수설계 완료 및 보수공사 추진계획

2017. 7.

문 화 본 부

(한양도성도감)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	문화재 전문가 자문반영
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□	구조 전문가 설계참여
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	문화재청 국고보조금
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

한양도성 인왕․백악 성벽 붕괴구간

보수설계 완료 및 보수공사 추진계획

한양도성 인왕․백악 성벽 붕괴구간 발굴․원인규명 및 정밀조사를 통해 진정성 있는 문화재 보수정비를 위한 설계를 마치고, 보수공사 추진계획을 보고드림

Ⅰ		추진경위

□ 인왕구간 : `16.3.7 성벽 붕괴 (`16.3.7 폭 6.7m, 높이 3.7m)

현장위치 : 종로구 부암동 산22-1	붕괴직후 모습

◯ 추진사항

- `16. 3. 9 : 문화재청 현장 합동조사 및 전문가 자문

- `16. 3.24 : 문화재청 안전조치 긴급보수비(53백만원) 요청

- `16. 5.13 : 안전조치 및 보수방안 마련 전문가 현장자문(2차)

․붕괴구간 포함 여장11타 해체, 발굴조사 추진후 보수방안 다시 논의

- `16. 6.17 : 추가붕괴 우려구간 성돌 제거(여장11타 44m)

- `16. 8.29 : 인왕산 성벽 붕괴구간 발굴·원인규명·보수설계 착수

ㆍ 용 역 명 : 한양도성 인왕산 성벽 붕괴구간 정밀조사 및 보수방안 마련

ㆍ 수행기관 : 한강문화재연구원(발굴)+시립대학교 산학협력단(원인조사)+볕터건축사사무소(보수설계)

ㆍ 과업기간 : 2016.8.31. ~ 2017.7.14

ㆍ 계약금액 : 202,246천원

ㆍ 과업내용 : 인왕 및 백악 성벽 붕괴구간 발굴·정밀조사 및 보수설계

- `16.12.21 : 인왕산 발굴 및 보수방안 전문가 자문(3차)

․ 안전을 위해 체성은 해체보강 범위를 넓게 하고, 여장은 창의문 구간 형태로 복원

- `17. 2.15  : 인왕구간 보수관련 한양도성자문위원회 전문가 자문(4차)

․ 배수에 지장이 없도록 하고, 최대한 옛 성돌을 재활용 하는 방안 검토

□  백악구간 : `16.7.16 성벽 붕괴 (폭 3.0m, 높이 2.5m)

현장위치 : 성북구 성북동 산25-1	붕괴직후 모습

◯ 추진사항

- `16.7.18 : 전문가 현장자문 (여장제거 및 발굴조사·원인규명 필요)

- `16.7.28 : 안전조치 긴급보수비(22백만원) 요청

- `16.9.12 : 추가붕괴 우려구간 성돌 제거(여장1타 5m)및 가림막 설치

- `17. 1.30 : 성벽 붕괴구간 발굴·원인규명·보수설계 착수

- `17. 2월~5월 : 성벽 발굴 및 보수방안 마련

- `17. 6. 1 : 발굴결과 및 보수방안 확정, 전문가 자문

․체성은 숙종시기 형태로/ 여장은 연속성을 위해 인접여장 형태로 보수

Ⅱ		붕괴원인 규명

□ 발굴조사 결과

◯ 수축시기 및 면석형태와 기저부 확인 후 발굴단면 등 성벽 내부 기록

◯ 인왕구간은 태조때 축성 / 백악구간은 순조 이후에 무너진 성돌로 개보수

□  붕괴원인

<인왕구간>

◯ 성벽의 뒷채움 돌이 짧고, 우천시 토사 유입으로 성돌 이완.

◯ 수직하중 증가(군초소, 전신주, 여장 등)으로 성벽 변형 발생 추정.

<백악구간>

◯ 면석이 작고 뒷뿌리가 짧으며, 뒷채움 돌이 견고하지 않은 상황에서 우천시 토압 작용.

◯ 붕괴구간은 순조~숙종연간 사이에 있으며, 작은 성돌 위주로 축성되어 좌우측 면석의

강성압력 집중으로 성벽 변형 발생.

Ⅲ		보수계획

그동안 개최한 문화재 관련 전문가 자문 및 논의결과에 따라 최종 보수범위 및 방법 확정

□ 보수 방법

<인왕구간>

◯ 체 성 : 붕괴구간 및 주변부 42m , 태조 양식으로 보수

◯ 여 장 : 창의문 주변 숙종양식 여장형태로 복원

◯ 인왕구간 보수 범위 및 방법

<백악구간>

◯ 체 성 : 붕괴구간 및 주변부 9m, 숙종연간 양식으로 보수

◯ 여 장 : 연속성 유지를 위해 붕괴전 인접여장 형태로 보수

◯ 보수 범위 및 방법

□  공사비용 및 추진일정

◯ 총 사업비 : 3,476,000천원 (설계비 제외)

- 공 사 비 : 3,404,000천원 / 감리비 : 68,000천원 / 부대비 : 4,000천원

- 추진일정

기 간	공 사 내 용	소요예산
2017.9월~12월	가시설 설치, 자재운반, 성벽 해체공사 추진	531,000천원
2018년	성벽 체성부 보수복원	1,457,000천원
2019년	성벽 여장 복원	1,488,000천원

□  행정사항

[문화본부 한양도성도감]

◯ 문화재청 설계승인

- 보수설계 내용, 전문가 자문내용 반영, 설계도면 등 문화재 보수 설계승인

◯ 설계내역 계약심사

- 공사금액 적정성, 품셈․일위대가 등 산출내역서 검토, 설계내역서 확정

◯ 산림청 허가 및 공사전 군부대 심의

- 산림청 부지 사용 및 산지전용 허가

- 군부대 관할지역 공사관련 군사보안 심의

◯ 예산확보 및 재배정(한양도성도감→도시기반시설본부 건축부)

- 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존·정비,

한양도성 보수·정비

(단위 : 천원)

구 분	소 계	`17년 배정	`18년 예정	`19년 예정
총 계	3,476,000	531,000	1,485,000	1,460,000
시설비	3,404,000	516,000	1,457,000	1,431,000
감리비	68,000	15,000	26,000	27,000
시설부대비	4,000		2,000	2,000

[도시기반시설본부 건축부]

◯ 공사발주 및 시공

- 공사입찰 및 낙찰자 결정

- 보수공사 시행, 공사감독, 문화재청 기술지도자문

- 공사 중 군부대 출입 협의

- 공사 준공 및 정산

별도첨부 : 설계도서(도면, 내역서, 시방서) 각1부.  끝.