문서번호	방재시설부-13852
결재일자	2017.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
협조

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」

목재 시설물 설치 실정보고 검토보고

2017. 8.

도시기반시설본부

(방재시설부)

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」

목재 시설물 설치 실정보고 검토보고

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」의 식재포트 벤치 및 트렌치 덮개에  대한 목재시설물 설치 실정보고에 대한 검토 보고임.

【관련근거 : 서울역(건)제17-579호(2017.08.08.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울역 7017 프로젝트 건설공사

○ 공사위치 : 서울시 중구 남대문 5가 ~ 만리동 1가 62

○ 시 공 사 : 홍익건설산업(주), ㈜동원개발

○ 도 급 비 : 25,138,300,000원(조경 : 5,918,270,000원)

○ 공사기간 : 2016.04.18. ~ 2017.10.31.

□ 보고내용

○ 변경사유

-. 식재포트 목재 붙임

벤치형 식재포트의 목재 규격을 상향(T19mm→T30mm)하고 설치 방식이 변경

(에폭시접착→ STS철물 보강 고정)되었으며 보행로 이용자의 편의를 위해

벤치 설치 면적을 2배수 증가.

-. 배수트렌치  목재 설치

당초 LMC블럭(T=30mm)으로 시공했던 엘리베이터 전면 연결부외 11개소의      트렌치 덮개를 설계자의 의도 및 발주처 지시에 의하여 목재 덮개로 변경

되었으며 개장전 설치를 위해 일부 물량은 야간작업 시행.

○ 변경 사항 적용 기준 : 변경 실시설계 도서 (2016. 8. 31)

-. 관련 근거 : 토목부 - 22440 (2016. 11. 02)

○  식재포트 목재 붙임 현황

식재포트 목재 붙임(당초)	식재포트 목재 붙임(변경)

- 수량검토

공 종	당 초			변 경			비 고
	규 격	단위	수 량	규 격	단위	수 량
나. 포트 운반 및 설치
식재포트 목재 붙임	T=19mm	㎡	125.7			-
목재 트렌치 덮개(곡선부)			-	A=18㎡	식	1
목재 트렌치 덮개(직선부)			-	A=6.32㎡	식	1
식재포트 목재 붙임			-	T=30mm (B.Type 1,700)	개소	74
식재포트 목재 붙임			-	T=30mm (B.Type 2,500)	개소	145
식재포트 목재 붙임			-	T=30mm (B.Type 3,200)	개소	26
식재포트 목재 붙임			-	T=30mm (B.Type 4,800)	개소	20
식재포트 목재 붙임			-	T=30mm (C.Type 2,500)	개소	19
식재포트 목재 붙임			-	T=30mm (C.Type 4,800)	개소	6

○ 공사비 증감내용                                    (단위:천원)

공 종	단위	변경전			변경후			증 감	비 고
		수량	단가	금 액	수량	단가	금 액
목재 시설물 설치공사
Ⅵ-1. 고가도로
Ⅵ-1-2-1. 식재포트				-
식재포트 목재 붙임(T=19mm)	㎡			21,665			-	-) 21,665
식재포트 목재 붙임(T=30mm) (B.Type 1,700)	개소			-	74		31,481	+) 31,481
식재포트 목재 붙임(T=30mm) (B.Type 2,500)	개소			-	145		82,936	+) 82,936
식재포트 목재 붙임(T=30mm) (B.Type 3,200)	개소			-	26		18,195	+) 18,195
식재포트 목재 붙임(T=30mm) (B.Type 4,800)	개소			-	20		11,128	+) 11,128
식재포트 목재 붙임(T=30mm) (C.Type 2,500)	개소			-	19		11,443	+) 11,443
식재포트 목재 붙임(T=30mm) (C.Type 4,800)	개소			-	6		3,515	+) 3,515
Ⅵ-1-2-2. 기타시설
목재 트렌치 덮개(직선부)	㎡			-	18.0		8,523	+) 8,523
목재 트렌치 덮개(곡선부)	㎡			-	5.32		2,497	+) 2,497
소 계				21,665			169,718	+) 148,053
직접공사비				21,665			169,718	+) 148,053
제경비				4,695			42,062	+) 37,367
공급가액				26,360			211,780	+) 185,420
부가가치세				2,636			21,178	+) 18,542
도급 공사비				28,996			232,958	+) 203,962

○ 신규단가 적용

- 시공사로부터 협의율(90.014%) 적용하여 실정보고 되었으나 별도 협의 후 적용

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 서울역 7017 프로젝트 건설공사(조경)시행중 식재포트 벤치 및 트렌치 목재 덮개 변경 설치에 대한 실정보고를 검토한 결과,

-. 식재포트 목재 붙임

벤치형 식재포트의 붙임 목재가 변형되는 것을 방지하기 위해 규격을 상향        (T19mm→T30mm)하고 설치 방식이 에폭시접착 방식에서 STS철물을 하부에        보강하는 방법으로 변경되었으며 “서울로” 이용자의 휴게 편의를 위해        당초 벤치 설치 수량의 2배수 증가 설치 : 적합

-. 배수트렌치  목재 설치

당초 LMC블럭으로 시공했던 곡선부 3개소와 엘리베이터 입구부외 9개소의       트렌치 덮개를 설계자의 의도 및 발주처 지시에 의해 목재 덮개로 변경        하고 “서울로” 개장전 설치를 위해 현장 가공과 일부(50% 적용) 시공을          야간작업 시행 : 적합

항목별 변경 사유가 타당하며 단가 및 수량 산출이 적정하여 실정보고하고 추후  설계변경에 반영 하고자 함.

□ 보고자 의견

○  “서울역 7017 프로젝트 건설공사(조경)” 중 「목재시설물 설치」 실정보고에 대한 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어 실정보고 승인 통보하여 현장 반영하고, 공사비에 대하여는 신규단가 협의를 통해 재조정하여 향후 설계변경 시 정산조치 하고자 함.

붙 임   건설사업관리기술단 실정보고 1부.  끝.