투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신자	내부결재
(경유)
제 목	‘엘리베이터 구매 설치(조달구매)’ 변경계약 검토

1. 시설과-4425(2017.8.9.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 변경계약 요청된「엘리베이터 구매 설치(조달구매)」건에 대하여 검토한 바. 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제15장 제7절의2(계약기간의연장)에 해당되어 계약변경이 타당하다고 판단되므로 아래와 같이 승인하고자 합니다.

가. 건    명 : ‘엘리베이터 구매 설치(조달구매)’ 납품기한 연기 요청

나. 계약업체 : 서울지방조달청(납품업체 : 주식회사 트라비스엘리베이터)

다. 계약방법 : 조달구매(제3자단가 구매)

라. 변경요청내용

구분	변경 전	변경 후	변경내용	변 경 요 청 사 유
납품기한	’17. 8.14.	’17. 8.31.	증 18일	기설치되어 있던 엘리베이터 철거 공사 준공기한과 일정 맞추기 위해 신규 엘리베이터 납품 기한 연장
과업내용	엘리베이터 제작설치	엘리베이터 제작설치	-
계약금액	37,454,370원 (※조달수수료별도)	37,454,370 (※조달수수료 별도)	-

마. 연기사유 귀책소재  : 서울역사박물관

바. 검토결과 : 현재 설치되어 있는 엘리베이터 철거 공사 준공 기한(’17.8.31.)과 연계하여 신규 엘리베이터의 납품 및 설치 일정을 맞추기 위해 납품 기한 연장 필요.

붙임 : 1. 납품기한 연기 의뢰 요청서 1부.

2. 엘리베이터 교체에 따른 운영 계획 보고서 1부.

3. 납품기한 여기 사유서 1부.

4. 합의각서 1부. 끝.

주무관	김선희A		주무관	조재영		총무과장	代김기용		경영지원부장	08/09 송임봉
협조자
시행	총무과-9440	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 종로구 새문안로 55	/	http://www.museum.seoul.kr
전화		/전송		/		/	부분공개(5)